문서번호	박물관과-4431
결재일자	2021. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
문경덕		이병두	04/21 이성은
협조
	주무관		남광연

「삼청각 별채 리모델링 전기공사」

설계변경(준공정산) 검토보고

2021. 4.

문 화 본 부

(박물관과)

「삼청각 별채 리모델링 전기공사」

설계변경(준공정산) 검토보고

「삼청각 별채 리모델링 전기공사」 의 건설사업관리기술인의 설계변경(준공정산) 요청사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 삼청각 별채 리모델링 전기공사

○ 공 사 비 : 159,895천원

○ 공사기간 : ‘20. 10. 28. ~ ‘21. 4. 25.

○ 시 공 자 : ㈜넥슨정보통신

○ 감 리 자 : ㈜펨코엔지니어링 종합건축사사무소

□ 추진 경위

○ ’20. 10. 27 : 삼청각 별채 리모델링 전기공사 계약(착공: ’20. 10. 28)

○ ’21. 04.(현재): 전기기구 설치공사 진행중

□ 설계변경 내용

○ 관련근거

- 지방계약법 예규(행안부 제114호, 2020. 6.10.)  공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 7절(계약금액의 변경)

- 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 관련문서

- 삼청각 별채 리모델링 전기공사 준공정산 설계변경 검토보고

(펨코엔지니어링 삼청각 제*******6호 , 2021,04,20)

○ 설계변경 사유

- 내부 인테리어 및 현장여건을 감안한 조명기구 및 전선관 물량변경에 따른 전등설비공사 금액 변경

- 건강보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금 등 각종 보험료 정산

○ 전등설비 공사비 변경 내용

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감
***	**********	*********	***************
***	***********	**********	****************
***	***********	**********	****************
***	**********	*********	***************
***	**********	*********	***************
************	***********	**********	****************

○ 경비(보험료 등) 정산 내역

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감
*****	***********	**********	**************
*****	**********	********	**************
*****	************	*	***************
**** *****	**********	*	**************
*****	************	*	***************
**** ***	************	*	***************
**** *****	************	**********	***************
****	************	**********	**************
******	***********	***********	***************

○ 계약금액 변경 내용

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감
*****	***********	************	***************
*********	***********	***********	***************
*********	***********	***********	**************
********	************	************	***************

□ 감리자 검토의견

○ 현장여건에 따른 변경사항 등으로 인해 전등설비 공사 수량이 증가되었으며, 수량, 단가 검토결과 이상없이 반영됨

○ 삼청각 별채 리모델링 전기공사 준공정산 설계변경 내역을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨

□ 처리의견

○ 본 공사 건설사업관리자의 기술의견 사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 삼청각 별채 리모델링 전기공사에 대한 설계변경을 승인하고, 재무과에 계약변경을 의뢰하고자 함

붙 임   1) 설계변경 내역서 1부.

2) 합의각서 1부.       끝.