코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰(물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축)

1. 물순환정책과-7588(2021.04.21.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 「물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축」용역에 대하여 아래과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 준공기한 연기

용역명	계약대상자	용역 준공기한		연기사유
		당초	변경
물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축 용역 (1차)	주식회사 동일기술공사 외1	2020.08.03. ~ 2021.04.30	2020.08.03. ~ 2021.06.30	**************************************************************************************************************************

*****************************

붙  임 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2 합의각서 1부.  끝.

	물순환정책과장
주무관	하록		물순환시설팀장	이웅희		물순환정책과장	04/21 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-7603	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3773	/전송	02-2133-1041	/	playhr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)