의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-5783
결재일자	2021. 4. 22.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,안전총괄과장

주무관		도로정책팀장	도로계획과장	안전총괄관	안전총괄실장	결재
정유빈		전기현	권완택	박종수	04/22 한제현
협 조
	광역도로계획팀장				황원근

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1627번, 고용진 의원, 기획재정위원회)

따로붙임 : 고용진 국회의원 요구자료 1부.  끝.

고용진 의원(기획재정위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 1627번

내    용 :

1. 동부간선 지하화 관련

동부간선 지하화 추진 경과, 향후 계획

□ 의원님께서 요구하신 자료를 다음과 같이 제출합니다.

1. 동부간선도로 지하화 추진 경과 및 향후 계획

○ 우리시에서 추진 중인 동부간선도로 지하화 사업은 구간별로 민간투자사업과 재정사업으로 추진하고 있으며, 추진경과 및 향후계획은 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 동부간선도로 지하화 사업 추진현황

동부간선도로 지하화 사업 추진현황

□ 사업개요

구 분	민간투자사업	재정사업
구 간	영동대로(경기고앞) ~ 동부간선도로(월릉교)	동부간선도로(송정동 ~ 당현4교) 영동대로(학여울역 ~ 경기고앞)
규 모	터널 4차로(병렬), 10.1km	터널 4~6차로(병렬), 11.3km 터널 4차로(병렬), 2.4km
추정사업비	9,261억원	19,840억원
개통예상년도	’27년	’28년

□ 주요 추진현황

【 민간투자사업 】

○ ’15.08.18	: 민간투자사업 제안 (제안사 → 서울시)

○ ’18.07.~’19.07.	: 민자적격성조사 (한국개발연구원)

○ ’19.12.10	: 민간투자사업심의위원회 심의(기획재정부)

○ ’19.12.20	: 서울시의회 동의

○ ’19.12.26	: 제3자 제안공고

○ ’20.07.31	: 우선협상대상자 선정 (대우건설 컨소시엄)

○ ’20.09.09	: 실시협약 협상 착수(한국교통연구원)

○ ’21.04.현재	: 사업시행자와 실시협약 협상 중

【 재정사업 】

○ ’14.06.29	: 도로정비기본계획 수립

○ ’15.11.~’18.10.	: 타당성조사 및 기본계획용역 시행 (서울시)

○ ’18.08.~’19.12.	: 타당성조사 (한국지방행정연구원)

○ ’20.04.27	: 투자심사 (서울시)

○ ’20.10.16 ~	: 기본설계 중

□ 향후 계획

【 민간투자사업 】

○ ’20.09.~’21.12.	: 설계VE, 건설기술심의, 실무협상

○ ’22.01.~’22.12.	: 실시설계 및 각종 인·허가 절차 이행

○ ’23. 상반기	: 실시계획 승인 및 공사 착공

【 재정사업 】

○ ’20.10.~’21.12.	: 기본설계 시행

○ ’22.01~	: 실시설계 시행

※ 향후 계획은 여건 변화에 따라 변경될 수 있음.

□ 위치도

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관 담당사무관	전기현 황원근
	☎2133-8065 2133-8082	주무관 주무관	정유빈 백종임
	작 성 일 : 2021.04.21.