문서번호	기전과-4126
결재일자	2021. 4. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
정영권		배수웅	04/22 代이성택
협조
	주무관		이지영

부정당업자 입찰 참가자격 제한 처분 관련

청문 실시결과 보고 및 행정처분 계획

2021. 4.21.

동부도로사업소

(기전과)

부정당업자 입찰 참가자격 제한 처분 관련

청문 실시결과 보고 및 행정처분 계획

「2021년 교통안전표지 유지보수공사」낙찰 후 계약포기자에 대하여 관계 규정에 따라 청문을 실시하고 그 결과 및 행정처분 계획을 보고 드림

1		추진근거

□ 2021년 교통안전표지 유지보수공사 낙찰업체 계약포기에 따른 조치계획

○ 기전과-2759호(2021.3.16.)

□ 처분사전통지서(청문실시통지)

○ 기전과-3446호(2021.4.5.)

2		청문개요

□ 건  명 : 부정당업자 입찰 참가자격 제한

□ 일  시 : 2021년 4월 20일(화) 10:00

□ 장  소 : 동부도로사업소 회의실

□ 청문당사자

사업명	업체명	대표	비고
2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	**********	***

□ 청문주재자 :*****************

□ 내  용 : 입찰 참가자격 제한 및 입찰보증금 납부

□ 사  유 : 정당한 사유없이 계약 포기

3		추진경과

□ ´21. 1.14. : 교통안전시설물 유지관리 및 사업추진 계획

□ ´21. 1.19. : 교통안전표지 유지보수공사 시행 및 계약의뢰

□ ´21. 1.28. : 입찰공고

□ ´21. 3.  4. : 낙찰자 결정 및 계약체결 안내

□ ´21. 3.12. : 낙찰자 계약포기 통보(낙찰자)

○ 포기사유 :　설계액 저가

□ ´21. 3.15. : 낙찰자 결정 취소 통보(재무과)

□ ´21. 4.  5. : 청문실시통지(송달일자 :′21.4.7.)

□ ´21. 4.20. : 청문실시

○ 대리인 청문 참석 및 의견제출서 제출

○ 청문조서 및 청문주재자 의견서 작성

4		청문상세내용

□ 처분원인 : 정당한 사유없이 계약을 체결하지 아니한 자

□ 처분내용 : 입찰제한처분 5개월이상 7개월미만

□ 청문현황

구분	참석자	의견내용	비고
***	***	******************	***
***	*** ***	************************************************************************** ***************************************************** *************************************************************************

5		행정사항

□ 부정당업자 입찰제한처분

○ 서울시 계약심의위원회 안건 상정(서울시 재무과)

○ 서울시 계약심의위원회 심의결과에 따라 처분

□ 입찰보증금 세외수입 처리

○ 잡수익고지서 발급 의뢰(관리단속과) 및 당사자 납부 통보

***********************

********************************************

□ 청문주재자 수당 지급

*******************

*********************************************

**********************************************************

붙임  1. 방침서 1부.

2. 처분사전통지서(청문실시통지) 1부.

3. 청문조서 1부.

4. 청문주재자 의견서 1부.

5. 의견제출서 1부.

6. 위임장 1부.  끝.