의원 요구 자료 제출

시 행	보행정책과-5252
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,교통정책과장

주무관		도로공간재편팀장	보행정책과장	보행친화기획관	도시교통실장	결재
이종석		정상모	이상국	이혜경	04/23 황보연
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1653번, 고용진의원, 기획재정위원회)

따로붙임 : (국회)의원 요구자료 1부.  끝.

고용진의원(기획재정위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 1653

□ 요구내용

1. 석계역 보행환경 정비 추진 현황

1) 석계역 보행환경 정비 추진 연혁

(현장점검, 노원구청 요청 등에 대한 주요내용, 일자 명시)

2) 2020~2021년 석계역 보행환경 정비 관련 추진현황과 예산 목록 세부사항 기재

(배정 예산이 없을 경우‘없음’으로 기재)

3) 담당자 성명, 부서, 연락처, 유관기관 담당자(한국철도공사 등)

1) 석계역 주변 보행환경 정비 추진 연혁

○ 자치구 공모 사업(석계역 주변 보행환경개선사업)

- 2018. 9. 12.: 2019년도 보행환경개선사업 자치구 공모계획 알림(시→자치구)

- 2018.10. 15.: 석계역 주변 보행환경개선사업 공모 신청(노원구→시)

※ 신청 당시 추정 사업비 650백만원(시비 470백만원, 구비 180백만원)

- 2018.10. 24.: 노원구 사업신청 대상지 현장확인(시)

- 2018.12. 19.: 사업대상지 선정결과 통보(시→노원구)

- 2019.  1. 10.: 설계비 예산 50백만원 배정(시→노원구)

- 2019.  5. 10.: 주민설명회 개최(노원구, 참석인원 약 27명)

- 2019.  1.~ 9.: 실시설계 시행(노원구)

- 2020.  1.  8.: 공사비 요청(노원구→시)

※ 총 공사비 978백만원(시비 685백만원, 구비 293백만원)

- 2020.  1.  9.: 공사비 배정(시→노원구)

※ 시비 685백만원 배정

- 2020.  4.~12.: 공사시행 및 준공(노원구)

2) 2020~2021년 석계역 주변 보행환경 정비 관련 추진현황과 예산 목록

○ 시 지정사업(석계로 일대 보행환경개선사업)

- 2020.12. 30.: 사업비 요청 안내 및 사업계획 제출 요청(시→노원구)

- 2021. 1.  5.: 사업비 요청 및 사업계획 제출(노원구→시)

- 2021.  1. 29.: 사업비 배정(시→노원구)

- 2021.  2. ~ : 실시설계 시행(노원구) ※ 상반기 설계, 하반기 공사시행

○ 자치구 공모 사업(광운대역 주변 보행환경개선사업)

- 2020. 6.  5.: 2021년도 보행환경개선사업 자치구 공모계획 알림(시→자치구)

- 2020.  6. 24.: 광운대역 주변 보행환경개선사업 공모 신청(노원구→시)

- 2020. 7.  6.: 노원구 사업신청 대상지 현장확인(시)

- 2020.12. 31.: 사업대상지 선정결과 통보(시→노원구)

- 2021.  1.  8.: 광운대역 주변 보행환경개선 설계비 예산 45백만원 배정(시→노원구)

- 2021.  2. ~ : 실시설계 시행(노원구)

○ 예산 목록                                                   (단위: 백만원)

년도	사업명	사업위치	예산 (시비)	추진 현황	비고
2019	석계역 주변 보행환경개선	석계역 주변	50	완료	2019년 설계 후 2020년 공사시행
2020			685
2021	석계로 일대 보행환경개선	석계로 일대	500	설계 중	석계역 및 광운대역 주변을 제외한 석계로
2021	광운대역 주변 보행환경개선	광운대역 주변	45	설계 중	2021년 설계 후 2022년 공사시행

3) 담당자 성명, 부서, 연락처, 유관기관 담당자(한국철도공사 등)

기관	부서	담당자	연락처	비고
서울시	보행정책과	이종석	2133-2418
노원구	토목과	오지찬	2116-4162	석계역 주변 보행환경개선 사업
노원구	토목과	온지현	2116-4148	광운대역 주변, 석계로 일대 보행환경개선 사업
서울특별시 지방경찰청	교통관리과	임종환	700-5119
국가철도공단 수도권본부	안전혁신처	박민석	788-5089
노원소방서	재난관리과	백준영	6981-6843	소화전 이설 협의
한국전력공사	노원도봉지사	백영훈	950-6243	한전주 이설 협의

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (보행정책과)	담당사무관	정상모
	☎2133-2418	주무관	이종석
	작 성 일 : 2021. 4. 22.