문서번호	치수과-2764
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
★주무관	치수과장	시설부장		한강사업본부장
전조연	최연호	代최연호		04/23 신용목
협 조

「한강 상수원 퇴적물 정비공사」

취수장 취수구 주변 긴급준설 검토보고

2021. 4.

한강사업본부

(치수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『한강 상수원 퇴적물 정비공사』

취수장 취수구 주변 긴급준설 검토보고

상수도사업본부로부터 *********************************************를 위해 취수구 주변 퇴적층 긴급준설 요청에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한강 상수원 퇴적물 정비공사

○ 공사규모 : 취수장 준설 및 사토운반 15,700㎥

- 암사(3,500㎥), 자양(3,200㎥), 풍납(2,600㎥), 강북(2,800㎥), 성남(1,900㎥), 일산(1,700㎥)

○ 공사기간 : 2021.4.7. ~ 12.31.

○ 공 사 비 : 807백만원 (도급비 660백만원, 이전비 147백만원)

○ 시 공 사 : 유호산업개발(주)

○ 건설사업관리 : ㈜글로벌건설이엔지

□ 긴급준설 요청개요 (상수도사업본부)

○ 관련문서 [상수도사업본부 생산관리과-2576호(2021.3.6.)]

- 한강「취수장 취수구 주변」토사 퇴적층 긴급 준설 협조 및 건의

○ 요청내용

- **********************************************************************

- 준설대상 : 시 관리대상 4개 취수장 (암사, 자양, 풍납, 강북)

- 준설범위 : 취수구 반경 50m, 깊이 최소 0.5m ~ 1.0m

․ 현재 운영 중인 조류차단막 내부까지 깊이 1m 내외 충분한 준설

․ 설치 운영 중인 조류차단막 및 오일휀스는 정수장에서 철거 등 협조

□ 검토의견

○ 최근 수돗물 유충사고로 수돗물 관련 시민 불안감 증폭되는 상황으로 상수도사업본부 요청과 같이 취수구 주변에 대한 긴급 준설 필요

- 수돗물 유충사고 : ’20년 인천,  ’21.2월 제주도

○ 준설범위(물량)는 금년 예산 및 홍수기 이후 상수원 수질확보를 위한 추가준설을 감안하여 협의 조정 (상수도사업본부․물연구원 협의 완료)

- 상수도사업본부 요청내용과 같이 준설시 예산부족으로 시행곤란하고, 홍수기 이후 취수장 주변 퇴적토 및 이물질 제거를 위한 최소 준설예산 확보 필요

․ 긴급준설 소요예산(당초) : 1,113백만원 (26,500㎥)

- 준설범위 조정 : 반경 50m → 30m,  깊이 1.0m내외 → 0.5m내외

․ 긴급준설 소요예산(조정) : 334백만원 (7,950㎥)

○ 수돗물 유충사고의 국민적 민감도, 긴급준설 공사의 효율성 등을 감안 타기관 관리 취수장에 대해서도 긴급준설 협의 시행

- 준설대상 : 성남 취수장(성남시),  일산 취수장(한국수자원공사)

- 준설물량 및 소요예산 : 3,000㎥ (126백만원)

□ 조치계획

○「한강준설 감독권한대행 건설사업관리자」에게 상기 검토내용과 같이 취수장 취수구 주변에 대해 긴급준설토록 작업지시하고,

○ 준설물량은 작업 전후 하상측량성과와 야적장 적치량을 비교하여 적은 값으로 향후 설계변경시 반영토록 조치코자 함.

붙임  1. 협조공문 1부.

2. 한강 상수원 취수장 위치도 1부.  끝.