문서번호	도로보수과-3776
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		代이상구	04/23 고영준
협조

『2021년도로부속물일상유지보수공사(연간단가)』설계변경 (1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  4.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경 (1회)  검토보고

우리사업소에서 시행중에 있는『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』과 관련하여 교통부속물 관련 민원사항(신규공종)에 대해 신속하고 안전한 도로유지관리에 필요성이 있어 설계변경(제1차)을 시행하고자 함.

		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)-북부

❍ 공사기간 : 2021.01.28.~2021.12.31

❍ 공사규모 : 과속방지턱 도색 1,100㎡, 부속물 세척 8,500㎡ 등

❍ 공 사 비 : 260백만원(도급비 260백만원)

❍ 시 공 사 : **************

		설계변경 사유

❍ 교통안전시설물 유지관리 예산 재배정

▶ 교통안전시설물 신규 물량(무단횡단금지시설, 도로반사경, 표지병 등)

▶ 각종 교통관련 민원사항에 대해 신속하게 처리

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	공 사 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
총공사비	259,740,470	351,930,470	증)92,190,000
도 급 비	259,740,470	309,726,000	증)49,985,530
관 급 비	-	20,000,000	증)20,000,000
이 전 비	-	22,204,470	증)22,204,470

❍ 추가 신규 공정내역

- 교통안전시설공

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
무단횡단금지시설 설치	독립형	경간	-	700	증)700
무단횡단금지시설 철거	독립형, 연결형	경간	-	800	증)800
도로표지병 설치	양면형	개	-	120	증)120
도로표지병 철거	AL몸체	개	-	50	증) 50

- 예산과목

· (일반회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리. 도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

· (교통사업특별회계) 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전관련 도로부속물 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 교통안전부속물을 적시에 정비하여 민원발생을 최소화하고 예산범위 내에서 설계변경(1회)을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계변경(1회) 내역서 1부

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 검증 확인서 1부.

4. 교통안전부속물 예산 재배정 공문 1부.  끝.