투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(가락지하차도 보수공사)

1. 시설보수과-1955(‘21. 3.10)호 및 시설보수과-2855(‘21. 4. 7)호 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『가락지하차도 보수공사』에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기코자하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 가락지하차도 보수공사

나. 계약기간 : ‘20.10.12 ~ ’21. 4.30

다. 도 급 자 : ㈜성덕이엔씨 대표 김수봉

라. 도 급 비 : 2,128,260천원

마. 준공기한 연기 : ***

1) 준공기한 : 당초 (‘21. 4. 30) → 변경(**********)

	< 준공기한 연기일수 산정 〉
◆**************************************************** ◆*************************************************** ⇒ ******************* ※ *****************

2) 연기사유 : 붙임 ‘공사의 일시정지’ 기간에 상당한 준공기한 연기

바. 귀책소재 : 발주청(지체상금 미부과)

붙임  1. 가락지하차도 보수공사 현안사항 검토보고 1부.

2. 시설공사 진행사항 검토보고 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	오상호		시설보수과장	04/26 임영철
협조자
시행	시설보수과-3364	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0372	/전송	02-2040-0308	/	foc8850@seoul.go.kr	/	부분공개(7)