투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2021년 남산 소나무림 확대조성사업 설계변경 시행 요청

1. 녹지관리과-1342호(2021.4.26.)와 관련입니다.

2.『2021년 남산 소나무림 확대조성사업』에 대하여 아래와 같이 설계변경 하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

1) 사 업 명: 2021년 남산 소나무림 확대조성사업

2) 사업기간: 2021. 4. 8. ~ 5. 2.

3) 도 급 자: **************

4) 도급금액: ************

나. 설계변경 내역

구 분		공 사 금 액(단위: 원)			비고
		당 초	변 경	증 감
도 급 비	공급가액	**********	**********	**********
	부가가치세	*********	*********	********
	계	**********	**********	**********

1) 설계변경 사유: 현장여건에 따른 식재 위치 및 수량 변경 등

2) 예산과목: 중부공원녹지사업소 녹지관리과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의

대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물

보수 정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	이지혜		녹지관리팀장	代이지혜		녹지관리과장	04/26 박기선
협조자	재무팀장	김연호
시행	녹지관리과-1345	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3783-5949	/		/	부분공개(5)