문서번호	설비부-5477
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		오삼록	04/26 김호성
협조

『율곡로 지하차도 정보통신공사』

준공기한 연기 검토보고

2021. 04.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로지하차도 정보통신공사』

준공기한 연기 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『율곡로 지하차도 정보통신공사』준공기한연기에 대하여 검토 보고함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 율곡로 지하차도 정보통신공사

○ 위    치 : 서울 종로구 돈화문 ~ 원남동 사거리

○ 규    모 : 연장 810m(지하차도 320m 포함), 도로 확폭(4차로→6차로)

○ 계약기간 : `20.04.21.~ `21.04.27.

○ 계약금액 : ***********

○ 감리사/시공사: ㈜한국해외기술공사 / (주)웨이브컴

Ⅱ		관련근거

○ 준공기한 연기 및 설계변경 보고 [한해기 제20-997호 ('20.12.3.)]

Ⅲ		검토내용

○ 준공기한 연기

당 초	변 경	비 고
`20.4.21~`21.04.27	`20.4.21~`21.06.30	증)2개월

- 연기사유 : 선행공정(토목) 준공기한 변경(`21.6.30)으로 후속공정인 정보통신공사 연기

- 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 건설사업관리인 검토의견

- 토목공사 준공기한(`21.6.30)에 맞춰 정보통신공사 준공기한을 연기하는 것이 적정하다고 사료됨.

Ⅳ		보고자의견

○ 본 사업은 2014년도부터 장기계속공사로 시행중에 있으며 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 정보통신공사 준공기한 연기를 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부. 끝.