문서번호	도로계획과-5939
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		민자사업팀장	도로계획과장
장익겸		代김정식	04/26 권완택
협조	주무관		김정식
	전문관		代천주영

「이수~과천 복합터널 민간투자사업」

제안서 평가·협상업무 위탁 계획 보고

2021. 4.

안전총괄실

(도로계획과)

「 이수~과천 복합터널 민간투자사업 」

제안서 평가·협상업무 위탁 계획 보고

이수~과천 복합터널 민간투자사업 제안자의 제안서 평가 및 실시협약 협상에 대한 위탁 계획 보고임

□ 사업개요(최초제안 기준)

○ 위    치 : 동작구 동작동 (이수교차로) ~ 과천시 과천동 (과천지하차도)

○ 규    모 : 도로터널 - 왕복 4차로, 연장 5.4km

빗물저류터널(복합구간 포함) - 연장 3.8km, V=404천㎥

○ 총사업비 : 5,208억원 (시비 2,669 / 민간 2,539, ΄16.2월 불변)

○ 공사기간 : 착수일로부터 60개월

○ 추진방식 : BTO(건설-이전-운영) 방식 (운영기간 30년)

□ 추진경위

○ ΄17.03.15	: 민간제안서 제출

○ ΄18.10.15 ~ ΄20.07.20 : PIMAC 민자적격성조사

○ ΄20.10.07	: 재정계획심의

○ ΄20.10.27	: 민간투자사업심의

○ ΄20.12.16	: 시의회 동의

○ ΄20.12.31	: 제3자 제안공고 (서울특별시 공고 제2020-3498호)

○ ΄21.02.25	: 1단계 평가 완료 (적격, 롯데건설컨소시엄 1개사)

○ ΄21.03.19	: 2단계 평가 및 협상업무 위탁 의뢰 (KOTI, PIMAC, 서울공투)

- 위탁업무 수행 가능 : 한국교통연구원 민자도로관리지원센터 (KOTI)

- 위탁업무 수행 불가 : 한국개발연구원 공공투자관리센터(PIMAC), 서울공공투자관리센터

○ ΄21.04.23 : 위탁 협약서(안) 법률 자문 완료

□ 제안서 평가 및 협상업무 위탁

【위탁개요】

○ 위탁기관 : 한국교통연구원 민자도로관리지원센터 (KOTI)

○ 기    간 : ΄21.04.30~΄22.06.30

************************************************

********************************

【주요내용】

*********

*******************************************************************

*********************************************************************

*********

**************************************

□ 향후일정

○ ΄21.04.30	:  협약 체결 및 2단계 평가서류 접수

○ ΄21.05.	:  2단계 평가 시행

○ ΄21.05.	:  우선협상대상자 선정

○ ΄21.하반기~ :  실시협약 협상 시행

붙  임 : 제안서 평가 및 실시협약 협상업무 위탁협약서(안) 1부.  끝.