문서번호	토목부-8051
결재일자	2021. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	04/27 김용제
협조
	주무관		노순재

설계변경(전체13회, 8차2회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

2021.04.

도시기반시설본부

토목부

설계변경(전체13회, 8차2회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

방음벽 추가 시행, 하계교 철거 계획 변경 등 실정보고 승인사항에 대하여 설계내역에 반영하고, 차수 공사기간을 전체기간으로 조정코자 보고드림.

【관련근거: 도화(감리) 2021-8333호(2021.04.21.)】

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모 : 도로 확장 4차로→6차로, 연장 1.4km

○ 도 급 비 : 31,360백만원(8차 12,411백만원)

○ 공사기간 : ‘07.10. ~ ‘21.06.(8차 ‘20.01. ~ ‘21.04.)

○ 시 공 사 : ㈜풍산건설 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		설계변경 및 주요내용

○ 설계변경 현황【전체13회, 8차2회)】               (단위 : 백만원)

구 분		당 초	변 경	증·감(△)	비고
전체 13회	도급액	32,928	35,821	증)2,893
	공사기간	2007.10.17. ～ 2021.06.30.	2007.10.17. ～ 2021.06.30.	변경없음
8차 2회	도급액	12,411	15,953	증)3,542
	공사기간	2020.01.31. ～ 2021.04.30.	2020.01.31. ～ 2021.06.30.	증) 2개월

○ 설계변경 사유(전체 13회)                         (단위 : 백만원)

연번	변 경 내 용	공 사 비		증·감(△)	비고
		당초	변경
1	방음벽 추가(사슴아파트, 연지초등학교)	-	2,225	2,225
2	하계교 철거계획 변경	830	1,498	668
합 계		830	3,723	2,893

○ 설계변경 사유(8차 2회)                                  (단위 : 백만원)

연번	변 경 내 용	공 사 비		증·감(△)	비고
		당초	변경
1	방음벽 추가(사슴아파트, 연지초등학교)	-	2,225	2,225
2	하계교 철거계획 변경	830	1,498	668
3	잔여 공사 물량 반영	-	649	649
합 계		830	3,723	3,542

※ 추가공사(방음벽) 반영 및 원활한 사업 관리를 위하여 계약기간 61일 연장

○ 감리단 종합 검토 의견

- 동부간선도로 확장공사(1공구)의 전체13회 및 8차2회 변경 설계서 내용을 검토한 결과 2건의 실정보고의 변경 설계도서 반영이 적정하게 작성되었다고 판단되며,

- 추가공사(방음벽) 및 금차분 사업비 조정 반영으로 인한 8차공사 기간 연장 요청은 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 동부간선도로 확장공사(1공구) 설계변경 관련 감리단 검토의견이  타당하여 계약금액을 변경코자 하며, 향후 설계변경자문회의 결과를 반영하여 정산코자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 및 내역서 각 1부.  끝.