문서번호	방재시설부-5462
결재일자	2021. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김현곤		代손병도	전결 04/27 박홍봉
협 조
	주무관			손병도
	주무관			김희숙

『새로운 광화문광장 조성사업』

수목식재 전문가 자문·기술지도 시행결과 보고

2021. 4.

『새로운 광화문광장 조성사업』

수목식재 전문가 자문·기술지도 시행결과 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

국가중심광장인 새로운 광화문광장 조성사업 추진과 관련하여 수목이식 현장 자문 및 기술지도 시행 후 그 결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 위    치 : 종로구 세종로 1-67, 1-68

○ 규    모 : 65,342㎡(광장 조성 34,600㎡, 도로확장 및 정비  30,742㎡)

○ 사업비 : 428억원

○ 사업기간 : ‘20.11. ~ ’22. 2. (문화재청 월대복원 ‘23.12.까지)

○ 시공/감리 : ㈜신성종합조경 외 4개사 / ㈜제일ENG 외 3개사

□ 수목식재 규모

○ 기존 가로수(대형목) 현황 : 139주

- 대형 은행나무 가로수(R50∼100) : 29주

(2009년 세종로 중앙분리대 이식목 : 정부종합청사 14주, 의정부터 15주)

- 기타 가로수 : 110주 (은행나무 82주, 느티나무 25주, 칠엽수 3주)

○ 식재계획

- 키 큰나무   : 소나무, 느티나무 등 34종 338주

- 키 작은나무 : 진달래 등 29종 4,206주

- 초화류      : 수호초 등 34종 41,201본, 잔디 2,604㎡

○ 난지물재생센터 내 대형목 활용 : 느티나무 12, 팽나무10주, 회화나무 3주

□ 전문가 현장자문 및 기술지도

○ 자문 및 기술지도 내역

일 시	장 소	주요내용	****
3. 22. 8시 ∼ 15시 (6시간)	난지물 재생센터	- 이식대상 수목 선목 - 굴취 및 단근작업 기술지도	*** ***************
3. 24. 9시 ∼ 12시 (3시간)	난지물 재생센터	- 굴취 및 단근작업 기술지도	*** ***********
3. 24. 13시 ∼ 16시 (3시간)	광화문광장	- 굴취 및 단근작업 기술지도
3. 30. 14시 ∼ 17시 (3시간)	광화문광장	- 굴취 및 단근작업 기술지도 - 심식된 기존 대형목 생육상태 점검 및 생육환경 개선방안 지도	*** ***

○ 자문 및 기술지도 세부내용

*2021. 3. 22. : 난지물재생센터**********

- 생육상태 및 식재계획 위치, 굴취작업 가능 여부 등을 고려 건전한

이식 대상 수목 선목

- 느티나무 굴취 작업 중 단근 시 절단부는 깨끗이 절단하여 함.

상처부위가 병원균으로부터 감염되는 것을 방지하고

보다 빨리 치유될 수 있도록 상처보호제(트리코트 등)를 도포할 것

- 운반 중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같이 보호조치 할 것

․ 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 함

․ 가지는 견고하게 결박할 것(이동중 수관이 바닥에 닿지 않도록 하며 가지가 부러지지 않게 조경공 기술자가 직접 감을 것)

*2021. 3. 24. : 난지물재생센터**********

- 뿌리분의 크기가 필요이상으로 클 경우 운반시 균열 등 파손될 위험성이 커지므로 적정 크기로 분을 만들어야 함.

*2021. 3. 24. : 광화문광장**********

- 문화재발굴 시 터파기로 인해 뿌리가 단근이 되었으나,

비교적 세근 발달이 잘된 상태로 생육중임에 따라 이식 시 활착이 용이할 것

- 굴취 시 기존 지반환경(잡석층)을 감안하여 분의 크기를 적정하게 만들 것

*2021. 3.30. : 광화문광장******************

<광장 문화재발굴 구간>

- 뿌리분 하부의 기존 잡석층을 제거하고, 뿌리가 있는 부분만을 굴취하여 튼튼하게 분을 만들 것

- 깊게 심겨진 상태로 생육 중인 수목의 경우 기존 굵은 철사가 나올 때 까지 표토를 제거하여, 본 뿌리부터 분감기 작업을 하여야 함

<의정부터 구간>

- 생육상황을 관찰하여 엽면시비, 방제작업을 실시하는 등의 관리를 요함

- 깊게 심어진 뿌리부분을 적정높이로 상향시켜줌에 따라 뿌리호흡이 좋아진 상태임

- 도로포장면까지 뿌리가 뻗어 상식(상승식재)이 곤란한 대형목의 경우 기존 뿌리분의 형상을 고려하여 상부에 복토된 흙과 함께 뿌리를 제거해야 함

□ 행정사항

○ 광화문추진단 예산재배정 후 외부 전문가 기술자문료 지급

********************

*****************************************

********************************************

○ 예산과목 : 도시재생실 광화문공장추진단, 광화문일대 역사성 장소성 회복, 광화문일대활성화, 광화문광장 시민소통 활성화, 사무관리비

***************************

***************************************