문서번호	생산관리과-4638
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

						시 민
주무관	생산관리과장		생산부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이규현	代이규현		서대훈		구아미		04/28 백호
협 조
	기획예산과장					박은섭
	예산팀장					홍경숙
	기전설비과장					최강욱
	기술진단과장					유통희

『유충관련 시설정비 및 효율적 예산 운영을 위한』

생산시설 긴급 정비관련 예산 조정ㆍ변경계획

2021. 4.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

『********* 및 효율적 예산 활용을 위한』

정수센터 생산시설 정비 예산 조정ㆍ변경계획

“강북정수센터 배출수처리시설개선” 사업 변경으로 사업예산을 조정ㆍ변경하여『강북 역세척 주기단축』및『생산시설 공정개선 최적화 용역』을 신속 추진코자 함

Ⅰ		생산시설 정비사업 추진 현황

□ 추진배경

○ “생산시설 ***************위한 예산 미 편성 사업의 지속 추진

- 정수센터 미세거름망 설치계획 (기전설비과-3048, ‘21.3.26)

- “강북정수센터 활성탄지 역세척주기 단축을 위한 회수시설개선” (‘21.4)

○ 사업 추진 부진으로 연내 집행 불가 사업예산 효율적 활용 필요

- “강북정수센터 배출수처리 시설개선” 사업 실시설계 등에 장시간 소요

□ 사업 추진현황 (부진사업)

○ 강북정수센터 배출수처리 시설개선 ⇒ 예산 3,000백만원

- (개요) 강북정수센터 용해성망간, 클로르포름 개선 등 수처리시설 설치

- (사유) 테스트베드 효과분석, 사전 절차 이행, 유찰, 실시설계 등으로 절대공기 부족

⇒ 연내 미집행 예상액 : 1,650백만원

□ 신규 추진 필요사업(긴급)

① 강북 유충관련 역세척 주기단축 사업 ⇒ (신규) 소요예산 1,450백만원

- 역세척 주기가 최소 현재 5일, 고도확장시 7일 소요

- 유충발생 및 비상운영시 역세척 주기 2일~3일 이내 단축 운영필요

②『정수생산 시설 공정 최적화 용역』추진 ⇒ (신규) 소요예산 400백만원

- 유충유입관련 표준 및 고도공정 생산시설 운영 전반의 분야별 문제점 체계적 검토 필요

- ‘22년부터 추진예정인 생산시설 확중 및 정수장 재건설 시 검토사항 반영

Ⅱ		정비예산 조정 및 변경계획

□ 예산조정 대상 및 현황

○ 대상사업 및 예산과목 : 정수센터시설정비(시설비), 강북 고도시설확장(시설비)

○ 사   유 : 부진사업의 집행 잔액 활용 유충 유입차단 시설 신속정비

	예산 조정 및 변경개요
◈ 연내 집행이 불가한『강북정수센터 배출수시설개선 사업』집행 불가예산의 효율적 활용 - (예상 집행잔액) 1,650백만원 (추진계획) 집행잔액 재조정 ’22년까지 장기계속사업 추진 ◈『강북 역세척 주기단축 사업』추진 예산 확보 필요 - (개요) 강북 역세척주기 단축 시설개선 : 회수펌프 3대증설 및 개량 (1,450백만원) - (추진방법) 적기 통수를 위하여『강북정수센터 고도처리시설 확장공사』에 포함 추진 ◈ 정수장 재건설 추진관련『정수생산 시설 공정 최적화 용역』추진예산 확보 - (추진방법) 장기계속사업 추진 사업비 (400백만원) ※ ‘21년 200백만원,, ’22년 200만원 편성

○ 사업예산 확보 및 조정(안)

- 연내 집행불가 예산 활용 유충시설 개선 사업 신속추진

- 예산 조정 및 변경(안)

(기준일 4.27현재 단위:백만원)

사업명			예산현액	집행액	집행불가 예상액	예산 조정(안)		조정·변경 후 예산현액
						감ㆍ배정	증ㆍ배정
계			11,987	1,394	1,650	1,650	1,650	11,987
정수센터 시설정비	기존	강북 배출수처리 시설개선	3,000	178	1,650	1,650	-	1,350
	신규	재건설관련 생산 공정최적화 용역	-	-	-	-	200	200
강북고도처리시설 확장공사(역세척 단축)			8,987	1,216	-	-	1,450	10,437

□ 행정사항 및 부서협조 사항

○ 정수센터 (시설비) 예산조정 및 변경 (협조) : 기획예산과

○ 관련부서(기전설비과,기술진단과) : 예산 조정 후 집행잔액 및 불용액 최소화

첨부 : 관련 사업 세부 설명서 3부. 끝.

첨 부

1. 강북정수센터 배출수질 개선

□ 사업 개요 : 청정지역 정수센터 방류수에 대한 수질오염물질 배출허용기준 준수를 위해 방류수질 개선

□ 사업 내용

○ 사업기간 : ’21. 1. ~ ’22. 4.

○ 사 업 비 : 3,000백만원(설계비 : 178백만원, 공사비 : 2,822백만원)

[‘21년 사업비 : 1,350백만원, ‘22년 사업비 : 1,650백만원]

○ 사업내용 : 용해성망간, 클로로포름, SS 동시제거 수처리시설 설치를 위한

방류수질 개선 시스템 설계 및 시공

□ 추진내용

○ 배출수 처리시설 테스트베드 2회 추진 및 완료보고(’21.2.)

공모시행	협약체결	1차 현장실증	2차 현장실증	최종 수질분석
’20.7.	’20.9.16.	’20.9.(5일간)	’20.12.(5일간)	’20.12.~’21.1.

○ 강북정수센터 배출수질 개선사업 추진계획 방침 수립(’21.2.)

- 배출수처리 테스트베드 결과 등 반영 방류수질 개선 시스템설계 추진

- 주요 수질오염물질 청정지역 배출허용기준

구 분	용해성망간	클로로포름	SS(부유물질)	비고
청정지역	2ppm	0.08ppm	10ppm

○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수(’21.4.)

□ 향후계획

○ ’21.09. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ ’21.10. : 개선공사 시공업체 선정(일반경쟁)

○ ’22.11. ~ ’22.4. : 배출수질 개선공사 추진

○ ’22.06. : 개선공사 시운전 및 사업완료 보고

작 성 자	생산부장 서대훈 : ☎3146-1301 기전설비과장 최강욱 : ☎1330 담당 문영민 : ☎1331

2. 강북 활성탄지 역세척 회수시설 개선

□ 사업 개요 : 강북정수센터 활성탄흡착지 역세척 회수시설 개선을 통해 역세척주기 단축(5일 → 2일이내)

□ 사업 내용

○ 사업기간 : ’21. 4. ~ ’21. 12.

○ 사 업 비 : 1,450백만원(설계비 : 50백만원, 공사비 : 1,400백만원)

○ 사업내용 : 회수조 회수펌프 3대, 회수조 토출배관, 자동제어, 기동반 등 개량

□ 세부 추진내용

○ 회수조 회수펌프 3대 개량(348m3/h × 3대 → 1,200m3/h × 3대)

구 분		규격 및 수량	비 고
현 재	회수펌프	348m3/h × 3대	상시2대, 예비1대
	토출배관	350㎜	회수조 →	┌ 착수정 회수(1,000㎜)
				└ 배슬러지지 이송(350㎜)
	최대토출량	800m3/h	3대 운전시
개 량(안)	회수펌프	1,200m3/h × 3대	상시 2대, 예비 1대
	토출배관	500㎜이상	회수조 →	┌ 착수정 회수(1,000㎜)
				└ 배슬러지지 이송(350㎜)
	최대토출량	2,400m3/h	2대 운전시(예비1대)

○ 회수조 토출배관 개량(350㎜ → 500㎜이상), L=약 200m

○ 역세척 자동제어 프로그램 교차·병행운영(역세척, 시동방수)

- 교차·병행운영	┌ 1계열 역세척(59분)	→	1계열 시동방수(60분)
	└ 2계열 시동방수(60분)	→	2계열 역세척(59분)

□ 향후계획

○ ’21. 5월      : 설계용역 발주

○ ’21. 7월초    : 설계용역 준공

○ ’21. 7월중순  : 기계‧전기공사(관급자재 등) 발주

○ ’21. 12월限   : 사업준공

작 성 자	생산부장 서대훈 : ☎3146-1301 기전설비과장 최강욱 : ☎1330 담당 김상신 : ☎1334

3. 정수생산시설 공정 최적화 용역 추진

□ 추진배경

○ 기후변화로 인한 신종오염물질(항생제, 유충 등)유입으로 정수처리여건 악화

○ 30년 이상 경과한 노후정수장 재건설 추진 시점 도래 (22~)

※ 재건설(안)  광암 침전지(’22~26년), 구의1(‘24년~28년), 암사1(‘25~29년), 영등포1(‘29년~33년)

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2021.07.∼ 2022.12. (1년 6개월)

○ 추진내용

- 생산·운영 전반에 대한 조사·진단을 통하여 문제점 도출 및 개선대책 수립

- 심층진단을 통한 서울시에 적합한 정수생산시설 표준모델 구축

- 현 생산시설(표준+고도) 시설개량 및 노후 정수장 재건설 추진 시 개선사항 반영

○ 추진방법

공정별 해외 사례 자료수집	⇒	공정별 국내 사례 자료수집	⇒	서울시 6개 정수센터 조사 및 진단	⇒	서울형 표준모델 구축

○ 대    상 : 서울시 6개 정수센터 취수시설 ∼ 정수시설

○ 소요예산 : 400백만원

- ‘21년 200백만원, ’22년 200백만원을 확보하여 장기계속사업으로 추진

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 정수센터시설정비, 시설비 및 부대비

□ 향후계획

○ 기술용역 타당성 심사요청 :  ‘21. 5월

○ 기술용역 발주심의 및 사업수행능력평가 심의 : ‘21. 6월

○ 기술용역 시행 : ‘21. 7월(예정)

작성자	생산부장 : ☎3146-1301 기술진단과장 : 유통희☎1360 담당 : 장현성☎1362