문서번호	시설개선과-3274
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
유정하		진종구	04/28 윤정한
협 조
	주무관			김상욱

전기시설물 정비 계획

2021. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

전기시설물 정비 계획

우리과에서 유지관리하는 전기시설물 중「뚝섬승마장 CCTV전원 누전보수 등 13건」에 대하여 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다

1		추진배경

□ 운영기획과 등 부서 요청사항, 입주단체 민원사항 처리

❍ 뚝섬승마장 무인경비 CCTV 전원 누전 보수, 제1수영장 풀장 강습용 음향 전원공급

❍ 입주단체 조도개선 및 부점등 등 민원사항 조치

□ 경기장 조명시설 정비로 이용시민의 편의 향상과 안전사고 예방

❍ 제1수영장, 제1풋살경기장, 보조경기장, 야구장 광장타워 조명 부점등 정비

❍ 서1문 가로등 설치, 공원등 부점등, 세척 정비로 야간 차량통행 및 보행환경 개선

2		정비계획

□ 정비내용

연번	건 명	현장사진	공사내용	소요금액(천원)
1	뚝섬승마장 무인경비 CCTV전원 보수공사		- 무인경비 CCTV 전원 누전선로 정비 □가요전선관(16㎜) 36m 설치 □절연전선(HFIX 4㎟) 74m 설치 □콘센트 2개 설치 □기타 배관배선 공사 1식 등	1,411
2	공공안전관본부 휴게실 전등교체공사		- 조도개선 전등 교체 □LED직부등(25W) 4개 설치 □직부등 4개 철거	309
3	제1수영장 풀장 투광등 컨버터 및 등기구 교체공사		- 습기 노출로 컨버터 불량 및 등기구 교체 - 시민 불편 및 안전사고 예방을 위해 야간공사 시행 □LED투광등 컨버터(200W) 99개 교체 □LED투광등(200W) 1개 교체 (※ 보유자재 컨버터 80개 활용, 부족분 추가 구매하여 공사용 자재 지급)	7,651
4	동문,남문,서1문게이트 노후 조명등 교체 및 남문 간선케이블 정비공사		- 노후 조명기구 교체 및 남문 게이트 노후 간선 케이블 정비 □LED투광등(160W) 11개 철거 □LED투광등(120W) 12개 설치 □점멸기(GPS) 2개 설치 □누전차단기 36개 설치 □기타 배관배선 공사 1식 등 (※ 남문, 동문 투광등 10개 교체 계획이 었으나, 운영기획과 서1문 추가 요청사항 반영)	11,891
5	공원등 부점등 램프 교체 및 글로브 세척공사		- 노후 조명기구 교체 □램프(50W) 15개 교체 □글로브 1개 교체 □소켓(리셉터클) 9개 설치 □글로브 세척 453개	23,449
6	잠실보조경기장 트랙조명 부점등 컨버터 및 등기구 교체공사		- 부점등 컨버터 및 등기구 교체 □LED투광등 컨버터(300W) 11개 교체 □LED투광등(300W) 1개 교체	1,029
7	제1풋살경기장 부점등 등기구 교체공사		- 부점등 등기구 교체 □LED투광등(200W) 5개 설치 □LED투광등(160W) 5개 철거 (※ 당초 투광등 3개 교체 계획이었으나 2등 깜빡임 발생으로 5개 교체 변경)	708
8	119안전센터 데크 LED투광등 설치공사		- 문화광장 주차장 미 운영으로 야간 조도 개선 요청 민원에 따른 조명 설치 □LED투광등(120W) 2개 설치 □기타 베관배선공사 1식	2,447
9	잠실야구장 광장타워 부점등 컨버터 및 등기구 교체공사		- 부점등 컨버터 및 등기구 교체 □LED투광등 컨버터(200W) 1개 교체 □LED투광등(200W) 1개 교체	238
10	제1수영장 풀장 강습용 음향 전원공급공사		- 풀장 내 강습용 음향 전원설치 및 통신 공배관 설치 □경질비닐전선관(16㎜) 26m □절연전선(HFIX 4㎟) 2m 설치 □콘센트 1개 설치 □기타 배관배선공사 1식 등	977
11	주경기장 납직문 데크(장재근체욱센터) 부점등 등기구 교체공사		- 입주단체 부점등 등기구 교체 □LED직부등(35W) 3개 설치 □직부등 3개 철거	234
12	잠실주경기장 지하 301호(케이벨로) 공용전기 회로분리 공사		- 입주단체 내 공용전기 무단 사용 예방, 1개 장소, 1개 전원공급으로 안전사고 예방 □LED실내조명등(600×600) 1개 재설치 □경질비닐전선관(16㎜) 32m □절연전선(HFIX 4㎟) 53m 설치 □기타 배관배선공사 1식 등	1,714
13	서1문 가로등 설치 및 문화광장 조명타워 경사주 교정공사		- 가로등 미설치 구간 신설 및 문화광장 조명타워 경사주 교정 □가로등주(H=10m 2둥용) 1본 □보행등주(H=6m, 1등용) 4본 □조명타워 경사주 교정 4본 □기타 배관배선공사 1식 등 (※ 당초 가로등 2본 설치 계획이었으나, 지장물로 1본, 2등용 설치로 변경)	16,747
합 계				68,805

□ 신규공종 발생 내용 :분전함 재사용 설치 등 18개

3		조치계획

□ ‘21년 잠실종합운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 완료하고, 추후 설계변경하여 정산하고자 함.

❍ 개략 공사비 : 68,805천원

□ LED투광등, 컨버터 및 가로등주 등 공사용 자재 구매

❍ 소요예산 : 18,000천원

❍ 예산과목 : 노후체육시설 개보수 사업, 잠실종합운동장․구의야구공원 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비(※ 본 공사 낙찰차액 활용)

붙임 1. 2차 작업지시 내역서 1부.

2. 신규공종 현황 1부.  끝.