	서울특별시도시기반시설본부
수신자	설비부장
(경유)
제 목	준공기한연기체결통보[서남물재생센터 태양광발전설비 설치 전기공사〕

1. 설비부-5324(2021.04.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 서남물재생센터 태양광발전설비 설치 전기공사

나. 변경사항 : 기간변동

다. 변경사유 : 사용전 검사 및 태양광발전설비 계통연계 일정 연기에 따른 준공기한 연장

라. 변경계약 체결현황

구 분	당 초	변 경
	총차	총차
계 약 자	*******	****
계약금액	***********	****
공사기한	**********	**********

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	심진경		재무과장	代김미경		총무부장	04/28 구본상
협조자
시행	총무부-7607	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 11층 도시기반시설본부 총무부(무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-2372	/전송	02-3708-2327	/	sjk1225@seoul.go.kr	/	부분공개(7)