투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(예산사업관리과장)
(경유)
제목	물가변동(제6회)으로 인한 계약금액조정 사전 검토의뢰[하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사]

우리 본부에서 시행중인 『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』은 총사업비 관리 대상 사업으로 『총사업비 관리지침』에 의거 붙임과 같이 물가변동(제6회)으로 인한 총사업비를 조정하고자 사전검토를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

나. 계약기간 : 2015.03.17. ~ 2022.07.31.

다. 계약금액 : 98,077,000,000원

라. 물가변동 적용내용

1) 물가변동 경과기간      : 487일 (직정조정일 : 2019.09.01  /  조정기준일 : 2021.01.01)

2) 계약금액               : 98,077,000,000원

3) 물가변동 적용제외 금액 : 91,959,054,000원

4) 물가변동 적용대가      : 6,117,946,000원

5) 물가변동 조정율        : 4.05%

6) 물가변동 등락금액      : 247,776,000원

7) 물가변동 조정금액      : 247,776,000원

붙임   물가변동(제6회) 검토자료 1부(별도 송부). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한재호		토목1과장	최진규		도시철도토목부장	04/23 최병훈
협조자	주무관	이형일
시행	도시철도토목부-4831	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-772-7126	/전송	02-772-7306	/	jh1004@seoul.go.kr	/	대시민공개