문서번호	시설보수과-3687
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		오재영	04/26 김영철
협조

2021년 도로시설물 세척용역 기성(1회) 검토보고

2021. 4

서부도로사업소

시설보수과

2021년 도로시설물 세척용역 기성(1회) 검토보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 ‘2021년 도로시설물 세척용역’과 관련하여 용역사로부터 기성부분 검사원(제1회)이 접수되어 작업내역에 대한 적정여부를 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 도로시설물 세척용역-서부

○ 용역기간 : 2020. 3. 30 ~ 12. 31

○ 계약금액 : 1,406,717천원

○ 용 역 사 : 주식회사 코드원 대표 서보경

□ 주요 추진경위

○ 2021. 3. 31  : 용역착수

○ 2021. 4.  4   : 도로시설물 세척작업(1차) 시행

○ 2021. 4. 22 : 기성부분 검사원(제1회) 제출

□ 기성(제1회) 검토

○ 금회 기성금액 : 195,810천원 (13.92%)

○ 기성실적 : 도로시설물 세척작업 시행(1차)

구 분	벽체타일	콘크리트	보도바닥	난간	방음판	등기구
계약물량	373,082㎡	401,450㎡	13,158㎡	18,938㎡	32,154㎡	10,046개
기성물량 (제1회)	49,263㎡	93,094㎡	1,586㎡	1,707㎡	6,632㎡	-
기성율(%)	13.2%	23.1%	12.0%	19.1%	20.6%	-

- 남산1,2,3호, 금화, 월드컵 세척 1회 실시

○ 주요 공종별 세척 사진

<터널 세척>	<터널 세척>	<터널 세척>

□ 검토의견

○ 상기 보고내용과 같이 2021년 도로시설물 세척용역 계약물량에 대하여 작업지시에 의거 세척작업 수행을 이상없이 완료하였으며,

○ 용역업체로부터 접수된 기성부분 검사원(제1회)의 작업물량 및 기성내역 등을 확인한 결과 공종별 세척물량이 적정하므로 기성부분 준공 처리코자 함.

※ 세척용역 예산 집행 내역

(단위:원)

구 분	계약금액	전회까지 기성액	금회 기성액	기성잔액
용역비	1,406,717,000	-	195,810,000	1,210,907,820

□ 향후계획

○ 2021. 4.  : 기성검사(감독)조서 제출 (→관리단속과)

○ 2021. 5~11월 : 년중 세척작업 지속 시행

붙임 : 1. 용역 기성부분 검사원(1회) 1부.

2. 기성내역서(1회) 1부.

3. 기성사진대지(1회) 1부.  끝.