문서번호	시설보수과-1445
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
연윤모	우배용	04/26 조선행

계약 변경 검토 보고

(난지물재생센터 홍보용 입간판 설치)

2021. 4.

서울특별시난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

계약 변경 검토 보고

【난지물재생센터 홍보용 입간판 설치】

횡단간판의 안전 설치를 위해 스카이크레인 추가 및 인력을 보충, 변경하여 고소작업과 차량통제에 만전을 기하고자 함.

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 난지물재생센터 홍보용 입간판 설치

○ 사업목적 : 센터 정문 앞 환경 개선 및 홍보

○ 계약기간 : 2021. 4. 5. ~ 2021. 4. 30.

○ 계약업체 : *******

○ 계약금액 : *******************

□ 변경 내용

○ 증‧감 내역

품명	단위	증가량			금액
		변경전	변경후	증감	변경전	변경후	증‧감
전면조명용 알미늄 후렉스 간판 제작	-	*	*	*	*********	*********	**********
스카이 크레인	대	*	*	*	*******	*********	********
인건비	명	*	*	*	*******	*********	********
일반공과잡비	-	*	*	*	*******	*******	********

○ 변경 사유

- 설치하는 위치 아래 왕복 2차선 도로가 있어 안전한 간판 설치를 위해         차량 통제 인원 추가

- 빠른 설치와 고소작업간 안전사고 방지를 위해 스카이 크레인 1대 추가

- 기존 설치하는 철제 프레임이 휘어져있어 용접 및 작업시 추가 비용 발생

□ 향후계획

○ 증‧감을 반영하여 계약 변경 추진

구 분	변경 후	변경 전	비고
계약금액	금10,960,000원	금8,100,000원	증 금2,860,000원
계약기간	2021.04.05.~2021.05.20.	2021.04.05.~2021.04.30.	20일 연장

- 예산확보방안: 소액으로 기존 예산에서 추가사용

- 예산과목: 사업비용(700), 영업비용(710), 처리장비(716)                             수선유지교체비(214), 수선유지비(05)- 센터운영

○ 변경 계약 요청: 시설보수과⇒관리과

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.