문서번호	건축부-6548
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
조은주		정채문	04/28 이창구
협조
	주무관		김두환

「AI지원센터 건립공사 건설사업관리용역」

건설사업관리기술자 배치 조정(안) 보고

2021. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「AI지원센터 건립공사 건설사업관리용역」

건설사업관리기술자 배치 조정(안) 보고

『AI지원센터 건설사업관리 용역』의 원활한 업무처리를 위해 통신분야 건설사업관리 기술자의 배치 인·월수를 조정하여 용역 진행하고자 보고 드림

※ 전체 배치 인·월수 및 용역금액 변경은 없음

1		용역 개요

○ 용 역 명: AI지원센터 건립공사 건설사업관리용역(감독권한 대행)

○ 위    치: 서초구 태봉로 108

○ 용 역 비: 금 1,651,430천원(낙찰율: 78.454%)

○ 낙 찰 자: ㈜종합건축사사무소 근정

○ 용역기간: 2021. 5. 10. ∼ 2023. 5. 9.(착수일로부터 24개월)

○ 용역범위

- 건설기술진흥법 및 건설공사 사업관리방식 업무수행지침에서 정한 업무 등

- 건축, 토목, 구조, 안전, 기계, 전기, 정보·통신, 소방, 폐기물처리, 철거, 보수·보강 및 관급자재 등 공사 전반에 대한 건설사업관리

- 과업내용서 업무

○ 계약방법: 장기계속계약

2		추진 경과

○ ’21. 2. 17.	: 건설사업관리용역 시행계획 수립

○ ’21. 2. 18.	: 사업수행능력 평가기준 서면협의 요청, 예산 재배정 요청

○ ’21. 2. 19.	: 일상감사, 기술용역 타당성 심사 요청

○ ’21. 2. 23.	: 건설사업관리 용역 일상감사 완료, 건설사업관리 용역 예산 재배정 완료(거점성장추진단)

○ ’21. 2. 24.	: 건설사업관리 용역 기술용역 타당성 심사 완료

○ ’21. 2. 26.	: 사업수행능력 평가기준 서면협의 완료

○ ’21. 3.  5.	: 건설사업관리용역 입찰공고 및 계약의뢰

○ ’21. 3. 19.	: 건설사업관리 입찰공고

○ ’21. 3. 31.	: 사업수행실적 평가서 접수 완료

○ ’21. 4.  1.	: 건설사업관리 수행실적 평가서 접수결과 및 평가계획 방침수립, 시민감사옴부즈만 입회요청(건설사업관리 면접), 부실기술자 조회

○ ’21. 4.  9.	: 건설사업관리 사업수행능력 평가(참여기술인 면접 평가)

○ ’21. 4. 12.	: 수행실적평가(PQ) 결과보고, 사업수행능력평가 결과 통보

○ ’21. 4. 14.~16. : 건설사업관리 가격 입찰 및 적격심사

○ ’21. 4. 16.	: 낙찰자 선정(개찰)

3		기술자 배치 조정(안)

□ 조정 사유

○ 건설사업관리 용역 발주시 통신분야 비상주 기술자는 통신분야 상주 기술자 인·월수의 20%로 배치함

○ 건설사업관리자(계약 상대자)는 원활한 업무처리를 위해 전체 기술자 배치 인·월수와 용역비는 동일하게 유지하되, 통신분야 기술자 배치 조정을 제안함

☞  통신분야 비상주 기술자를 상주 기술자 인·월수의 10%로 감 배치하고, 10% 감 조치된 인·월수는 통신분야 상주 기술자 배치 인·월수로 증 배치

○ 이에, 「AI지원센터 건립공사 건설사업관리 용역」의 통신 분야 기술자 배치를 조정한 내역으로 계약 체결 및 용역 진행하고자 함

□ 조정 내역

구 분		기술자 배치 인·월수		비 고
		당초(발주)	변경(계약)
합계		167.55	167.55	변경없음
상주	소계	140.4	141.971
	건설	101.7	101.676	변경없음
	전기	21.4	21.402	변경없음
	통신	17.3	18.893	상주기술자 배치 추가
	소방	-	-
비상주	소계	27.15	25.579
	건설분야	18	18	건설분야 15%,변경없음
	전기	2.14	2.14	상주인원의 10%,변경없음
	통신	3.46	1.889	상주20% → 상주10%
	소방	3.55	3.55	변경없음

※ 배치 인·월수의 오차는 자료 산출시 소수점 이하 단수 표현 차이에 따른 것으로 실제 인·월수는 동일함.

4		이후 추진 계획

○ ’21. 4. 말.	: 건설사업관리 용역 계약 체결

○ ’21. 5. 10.	: 건설사업관리 용역 착수, 착수 회의

○ ’21. 5. 14.	: 건축공사 착공

붙임  1. 기술자 배치계획(당초)

2. 기술자 배치계획(변경).  끝.