문서번호	녹색에너지과-10703
결재일자	2021. 4. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		햇빛지원팀장	녹색에너지과장
고재철		서점숙	04/29 이문주
협조

**** BIPV 시범설치 사업기간 연장

2021. 4.

기후환경본부

녹색에너지과

**** BIPV 시범설치 사업기간 연장

**** BIPV 시범사업 관련하여 사업기간 변경 요청이 접수되어 검토 결과 타당하여 사업기간을 연장하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : **** BIPV 시범설치

○ 사업기간 : 2020. 11. 18 ~ 05. 31.

*******************************

*********************************************

*******************************

*****************************************

○ 설치규모 : 용량 63.53㎾

□ 사업기간 변경

○ 근 거

- 협약서(사업기간 연장 서울시 승인 필요)

****************************************

○ 사 유

- 5월 BIPV 설치 완료 이후 6월까지 부대공사 진행으로 비계(작업대) 존치가 불가피하고 6월내 비계 철거 후 전기안전 검사가 가능하므로 7월까지 사업기간 연장 필요

○ 변경 내용

*************************************************************************************

- 협약서(안) 및 이행(선금급)보증보험을 변경 사항을 반영 갱신코자 함

*******************************

***********************