문서번호	도로보수과-3907
결재일자	2021. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
황태선	이화신	04/29 고영준

『2021년 도로부속물 일상유지보수공사(연간단가)』 작업지시 (2차) 완료  보고

2021.  4.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업지시(2차) 완료 보고

우리사업소에서 시행중인「2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)」와 관련 2차 작업지시가 완료되어 이에 검토 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)-북부

∘ 공사개요

- 도로부속물 세척 : 8,500㎡

- 과속방지턱 도색 : 1,222㎡

- 옹 벽 보 수     :    35㎡

∘ 총공사비: *********

****************

∘ 도 급 자:*******************

▢ 1차 작업완료 내용

∘ 작업기간: 2021. 04. 05. ~ 05. 07.

∘ 작업구간: 강북구 인수봉로, 성북구 솔샘로, 월곡로 등 31개소

공종	정비물량(㎡)		증·감
	작업지시	작업완료
과속방지턱 도색	931	931	-

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	기 작업완료	2차 작업완료	잔 액	비 고
도급비	309,726	110,110	47,476	152,140
관급비	20,000	-	-	20,000
이전비	22,204	-	11,916	10,288
총공사비	351,930	110,110	59,392	182,428

▢ 조치계획

∘ 『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 시공물량을 반영하여 실정산하고자 함.

붙임  1. 작업완료 사진대지 1부.

2. 작업완료보고서 1부.

3. 작업완료 내역서 1부.  끝.