문서번호	공원시설과-2686
결재일자	2021. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
이병철	양돈욱	04/29 代이정환

- 광나루 한강공원 스케이트보드장 조성공사 -

실정보고서(사토장변경 등) 검토보고

2021.4

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 한강공원 스케이트보드장 조성공사 -

실정보고서(사토장 변경 등) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「광나루 한강공원 스케이트보드장 조성공사」와 관련 하여 시공사에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 제이디시 종합건설(주)-1( ̓̕21.4.29.) : 공사실정보고서

○ 제이디시 종합건설(주)-2( ̓̕21.4.29.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 광나루 한강공원 스케이트보드장 조성공사

○ 대    상 : 광나루 한강공원(풍납동 49-2)

○ 공사기간 :  ̕21. 4. 22. ～ 21. 8. 30

○ 공사주요 내용

- 스케이트 보드장 1명 : 1,500m,

- 트랜치 설치(300×300) : 180m

- 스케이트 기물 : 10종

- 휀스 : 180m

○ 도 급 비 : **************

○ 계 약 자 : 제이디시 종합건설(주) 대표 염선석

□ 실정보고 내용

▶ 사토장 변경

(당초 설계된 사토장이 협소하고 야적공간이 포화상태로 반입불가하여

김포시로 변경)

- 당초 : 경기도 남양주 와부읍 월문리 99-1( 22km)

- 변경 : 경기도 김포시 사성면 마조리 657(59.3km)

단가 : 운반거리는 늘어났으나 계약액조정 없이 기존 계약단가로 시행

▶ 경계석 하부 기초 변경(레미콘→현장타설)

(당초 경계석 하부기초부에 레미콘 타설예정이나 슬럼프 진행으로 경계석 작업이 곤란 및 경계석 작업시 관급자재 반입량(한차 6㎥)에 비해 사용량(3.7㎥)이 작아 남은잔량은 사용불가로 곤란)

- 당초 : 도로경계석(레미콘기초) : 185m

- 변경 : 도로경계석(무근, 인력) : 185m

○ 변경 세부내역

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 변경 금액 : 증 2,680천원

□ 검토 결과

○ 시공사에서 제출받은 실정보고서에 대하여 검토한 결과 기존 사토장 반입불가 등으로 인하여 운반거리가 늘었으나 단가변동없이 계약단가로 시행하고,

○ 경계석 하부에 레미콘타설 예정이나 레미콘 반입물량 대비 소요량이 적어서 남은양은 사용불가로 현장타설로 변경하는 것은 적정한 것으로 판단됨

□ 조치 계획

○ 광나루 한강공원 스케이트보드장 조성공사 추진 중 시공사에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 우선 시공조치하고 추후 설계변경에 차질없도록 시공사에 통보

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.