문서번호	급수운영과-9154
결재일자	2021. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
황대룡	권기섭	유동수		04/29 이재호
협 조

계약 금액 조정 검토 보고

【2020년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사】

2021. 4.

동부수도사업소

(급수운영과)

계약 금액 조정 검토 보고

【2020년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사】

	우리 사업소에서 시행중인 「2020년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착 복구공사」 의 현장 여건 변화에 따른 시공물량 증·감 에 대하여 계약 금액 조정 검토 결과를 보고 드림.

공사 현황

○ 공사명: 2020년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속 단가계약)

○ 도급자: ****************

○ 도급 금액: **************

○ 공사 기간(총 부기기한): 2020. 5. 22.~2021. 5. 31.

○ 공사 개요: 아스팔트포장–528a, 콘크리트포장–6a, 보도블록포장-15a 등

계약 금액 변경 내용

○ 계약 금액 변경 사유

- 토공, 포장공, 차선 도색공 등 시공물량 증·감에 따른 변경

- 건강, 연금, 노인장기 요양보험료 정산에 따른 변경 등

○ 시공 수량 변경

- 시공물량 증·감 현황: 296개 공종

· 물량증가(64개 공종): 아스팔트 포장깨기 외 63개 공종

· 물량감소(232개 공종): 아트팔트 포장절단 외 231개 공종

- 사급자재 물량 변동: 32개 종

· 물량증가(5개 종): 보조기층재(75mm이하)  외 4개 종

· 물량감소(27개 종): 시멘트(40kg-1종)  외 26개 종

계약 금액 조정

○ 계약 금액 변경

(단위: 원)

구 분	금액 변경			비 고
	당 초	변 경	증·감
도급비	*************	*************	*************	******
공급가액	*************	*************	**************
부가가치세	************	***********	************

조치 의견

○ 위와 같이 「2020년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)」 의 계약 금액이 **********************되어 본부(안전조사과)에 계약 금액 조정 심사 의뢰하고 그 심사 결과에 따라 계약 금액  조정 및 최종 설계 변경을 시행코자 합니다.

◇ 계약 금액 조정 심사

1) 계약 금액 조정 심사: 상수도사업본부 안전조사과

2) 금액 조정 대상 기준

- 단가계약(장기계속포함) 공사는 도급비 증액 시

· 도급비 10%이상 증액 시 재발주(2000. 1. 6. 시장방침 NO.9)

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.