문서번호	전시과-829
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전시과장	학예연구부장	서울역사박물관장
김현영	代이진현	박현욱	04/30 배현숙
협 조	경영지원부장		代김춘섭
	총무과장		김춘섭
	시설과장		최병석
	도시유적전시과장		김종은
	교육대외협력과장		김지연
	조사연구과장		김양균
	유물관리과장		홍승주
	보존과학과장		강성희
	한양도성연구소장		최형수
	청계천박물관장		한은희
	서울생활사박물관장		박상빈

서울역사문화특별전

‘한양의 상징대로, 육조거리(가제)’

전시계획(안)

2021. 4.

서울역사박물관

(학예연구부 전시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	자문, 제안서 평가위원회 개최
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■	타기관 소장 유물 대여 협의
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□	보도자료 배포 전시패널 4개국어 제공
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울역사문화특별전 전시계획(안)

‘한양의 상징대로, 육조거리(가제)’

조선시대 최대의 관청가인 육조거리의 위상과 역할에 관한 기획전시를 개최함으로써 오늘날 광화문 광장의 역사성·장소성·상징성을 환기시키고 시민에게 친근한 장소로 인식되고자 함

Ⅰ		전시개요

□ 전 시 명 : 한양의 상징대로, 육조거리(가제)

□ 전시기간 : 2021.11. 5. (금) ~ 2022. 3.27. (일)

□ 전시개막 : 2021.11. 4. (목) 15:00

□ 전시장소 : 기획전시실 A

□ 전시내용 : 임진왜란 이후 달라진 경복궁의 위상과 18세기 육조거리의 풍경을 살펴보고, 육조 관청의 기능과 역할, 육조 관원의 생활상 등을 입체적으로 전시함으로써 육조거리 관청가 재조명

□ 소요예산 : 286,800천원

Ⅱ		추진방향

○ 조선시대 한성부의 중심가로로서 육조거리의 역사적, 장소적 의미와 상징성 소개

○ 육조거리의 풍경을 담은 회화와 지도, 다양한 시각자료(영상, 모형)등을 통해 관청의 배치와 구조 등 18세기 관청가의 생생한 모습 구현

○ 서울역사박물관 학술조사보고서인 <의정부지 발굴조사보고서>(2020) 및

서울기획연구 <한양의 중심 육조거리>(2020)의 연구 성과를 반영한 전시

○ 전시 결과물은 향후 의정부터 현장유적전시관(가칭) 조성에 콘텐츠로 활용할 수 있도록 공유

작 성 자	학예연구부장 :박현욱 ☎724-0138 전시과장 :정명아 ☎0145 담당 :김현영 ☎0149

Ⅲ		전시구성(안)

구성		주요자료 및 연출
Prologue	광화문 발굴이야기
PART Ⅰ : 광화문 앞, 조선 최대의 관청가
1. 육조거리의 탄생	‐ 육조거리의 조성 : 면조후시 ‐ 육조거리의 위치와 공간적 범위	조선왕조실록(장서각), 비변사계회도, 육조거리 모형·영상
2. 육조거리의 변화	‐ 육조 관청의 배치 : 문무 상대배치 ‐ 시기별 육조거리 관청가의 변화	도성대지도, 해동지도(규장각), 한양도, 한양전도, 신증동국여지승람
3. 육조거리의 품격	‐ 왕의 길, 관원의 길 ‐ 궁중행사, 관청행사, 산대놀이의 공간	국조오례의, 승정원일기(규장각), 속대전
PART Ⅱ : 육조거리의 관청들
1. 백관을 통솔하고 서정을 총괄하는 의정부	‐ 의정부의 관원과 이속 ‐ 의정부 청사의 건물과 시설	황각고실(중도), 의정부 청사 모형, 의정부터 발굴 유물
2. 속아문으로 알아보는 육조의 업무	‐ 관청별 고유 업무와 관원의 업무 분장 ‐ 육조 청사의 건물과 시설	경국대전, 대전통편, 선부정요(중도), 탁지지·춘관지·기성사례·추관지(규장각), 관인(고궁)
3. 그 밖의 관청들	‐ 중추부, 사헌부, 한성부, 기로소 ‐ 육조거리 배후의 관청들	사헌부장고(규장각), 경조부지(중도), 기사지(장서각), 영조을유기로연·수작연도병
PART Ⅲ : 육조 관원의 일상
관원이 되는 길	‐ 음서와 과거, 문무품계, 인사발령, 근무성적평가(포폄)	홍재전서, 무명자집(개인), 무신친정계첩(중박), 포폄문기
2. 출근과 퇴근	‐ 출퇴근 시간, 이동수단과 수행원, 공좌부, 근무일수와 휴일	초헌·교자(고궁), 등청도·평생도(중박)
3. 관직 생활	‐ 관원의 복식(관복), 식사, 월급(녹봉), 숙직 및 차출업무	관복 일괄, 고신과 녹패
Epilogue	거리에서 광장으로
※ 추진 과정 중 전시구성(안)은 수정 ․ 변경될 수 있음

Ⅳ		세부추진계획

□ 전시물 제작 설치 용역

○ 사업내용 : 전시설계, 연출기획, 전시그래픽․영상․모형 등 전시물 제작․설치,

유물복제, 텍스트 번역, 유물운송, 자문회의 수당, 저작권료 등

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제43조 1항 및 제44조

※ 협상에 의한 계약 사유 : 전문성 확보

ｏ 박물관 전시는 전문성과 모형․작동장치․영상 등 창의적 물품제작이 큰 비중을

차지하는 대중적 작품이므로 설계자의 의도구현이 관건임

ｏ 구체적인 제안서 및 설계도면․내역서 등을 통해 전시업체를 선정함으로써 가격

경쟁력보다 전시의 질적인 내용을 우선시하여 평가할 수 있음

ｏ 제안서 평가위원회의 결과에도 불구하고 우선협상순위 업체 및 이하순위 업체와 협상

절차를 통해 박물관과 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약할 수 있음

○ 선정 절차

구매규격 사전공고 (5일)	⇨	입찰 공고 (20일)	⇨	질의 답변	⇨	입찰등록 및 제안서접수	⇨	제안서 평가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

□  도록 및 홍보물 제작

○ 도록 제작

- 사업내용 : 전시도록 기획․편집, 조판, 교정, 인쇄, 배포, E-book 제작

- 제작개요

‣ 규격 및 면수, 발행부수 : 국배판(280*220) / 210면 내외 / 1,000부

※ 추후 출판물 심의위원회 결과에 따라 일부 변경 가능

- 배포계획

‣ 무상배포 : 800부

※ 기본배포 300, 유관기관 200, 대외교류 170, 박물관 유료회원 80, 보관 50

‣ 유상판매 : 200부 (※ 판매가격은 출판물 심의위원회에서 결정)

○ 홍보물 제작

- 제작내용 : 리플릿(15,000부), 포스터(1,000부), 야외 통천배너(1종),

가로등 배너(2종 21set), 기타 홈페이지 게재용 파일 제작 등

□ 전시 자문위원회 운영

○ 구성 : 관련 기관 및 학계, 문화계 전문가 등 3~5인(※외부 자문의 경우는 자문비 지급)

○ 운영 : 전시기간 중 수시 운영, 전시내용 및 콘텐츠 구성안 검토 등

Ⅴ		예산집행계획

□ 소요예산 : 286,800천원

□ 예산과목

○ 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 활성화, 서울역사문화특별전,

일반운영비, 사무관리비․공공운영비․행사운영비․시설비․행사관련시설비

예산과목	예 산 액 (천원)	상세내역
통계목
사무관리비 (100-201-01)	109,800	◦ 그래픽․영상, 유물복제 등 전시물 제작 ◦ 전시모형 제작 ◦ 전시홍보물 제작 ◦ 원고료, 번역료, 저작권료, 조습제 구입 등 ◦ 유물운송 ◦ 기타 운영비(자문수당 등)
	27,000	◦ 전시도록 및 E-book 제작
공공운영비 (100-201-02)	1,500	◦ 유물보험 ◦ 도록․홍보물 발송
행사운영비 (100-201-03)	6,000	◦ 초청장 제작 ◦ 개막식 행사
시설비 (100-401-01)	13,000	◦ 전시설계
행사관련시설비 (100-401-04)	129,500	◦ 전시 구조물, 연출물 제작 설치
총 계	286,800
※ 세부 예산내역 및 집행방법은 업무 추진 상황에 따라 변경될 수 있음 ※ 전시 폐막(‘22.3.27.)에 따른 전시물 철거 및 유물 반송은 2022년 예산 활용

□ 예산집행 방법

○ 전시설계 및 전시물 제작․설치 : 협상에 의한 계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제43조 1항 및 제44조

○ 전시도록 제작 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제5항

○ 기타 운영비 : 개막식 행사, 제안서 평가수당, 조습제 구매 등

일반지출 또는 일상경비로 교부받아 집행

Ⅵ		추진일정

추진일정	추진내용
’21. 4.~7.	전시 계획 수립, 구매규격 사전공고(5일), 입찰공고(20일), 제안서 평가회, 업체 협상 및 계약 체결
’21. 7.~8.	전시 자문위원회 개최, 전시설계, 전시콘텐츠 제작, 유물 선정, 전시원고 작성
’21. 9.~11.	전시도록 제작, 대여유물 보험가입 및 운송, 전시보조물 설치 공사, 보도자료 작성 및 배포, 홍보물 발송, 전시유물 거치
’21. 11. 4.	전시 개막행사
’21. 11. 4. ~’22. 3. 27.	전시 운영, 관람객 설문조사
’22. 4.	전시물 철거 및 유물 반납 운송, 결과보고

7		부서별 협조사항

□ 총  무  과 : 예산 집행 및 행정 지원, 개막식 의전

□ 시  설  과 : 개막식·전시실 영상 촬영, 전시실 전기 및 조명 지원, 개막식 음향 및

마이크 설치, 무료주차 지원, 전시실 안전 유지 및 청소 지원

□ 교육대외협력과 : 보도자료 배포, 전시홍보 지원, 개막식 의전 지원

□ 조사연구과 : 서울기획연구 용역 자료 제공 협조

□ 유물관리과 : 전시물 촬영 및 실사·대출 협조, 개막식·전시실 사진촬영 협조 등

□ 보존과학과 : 유물보존 처리, 전시 보존환경(온습도, 조도) 관리. 끝.