문서번호	토목부-8350
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	04/30 김용제
협조

안전관리비 반영에 대한 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

2021. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

안전관리비 반영에 대한 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

『세종대로 도로공간 재편사업』과 관련 계획부서(보행정책과)에서 공사중 교통소통대책으로 시행한 교통신호수 비용을 지급하고 정산 보고 드림.

****************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 토목부-23867호(´20. 12. 8.) : 교통신호수 임금지급 검토 보고

○ 세종수 제2021-163호(´21. 4.27.) : 건설기술진흥법 안전관리비 추가변경 실정보고

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

○ 위    치 : 서울역 교차로~시청 교차로

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021.  3. 31.

○ 도 급 비 : 6,422백만원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 『세종대로 도로공간 재편사업』 추진 중 공사 시행 시 공사 본선 구간 외에 우회도로 전반으로 교통소통의 원활함을 위하여 보행정책과에서 주요 교차로에 교통신호수를 배치 및 운영한 사항에 대하여 내역 반영이 필요함.

○ 대상교차로 현황(41개소)

연 번	교 차 로	개소	경찰서	비고
1	을지로2가R, 퇴계로2가	2	중부
2	세종대로R, 광화문R, 정부서울청사R, 경복궁R, 경복궁역R, 종로구청R, 구세군회관R, 정동R	8	종로
3	시청입구R, 을지1가R,덕수궁R, 한국은행R, 회현R, 숭례문R, 염천교R, 중림동R, 서울역R, 동자R, 신한은 본점, 숭례문 버스정류장관리	14	남대문
4	경찰청앞R, 서대문역R, 독립문역R, 충정로역R	4	서대문
5	창덕궁 앞R, 종로3가R	3	혜화
6	숙대입구R, 남영역R, 남영역, 삼각지역R, 용산보건소R, 용산전자산가R, 용산역R, 한강대교북단R, 현대한강(아)R, 이촌동R	10	용산
계		41

○ 지급요청액 확인

〖금액단위 : 천원〗

연 번	문서번호	문 서 제 목	요청금액	지급금액	차 액
*	***** ******	************** **************	*******	********	*****
*	***** ******	**************	*******	********	******
*	***** ******	************** ******	*******	********	******
*			*******	*******	******

○ 교통신호수 증·감 현황

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증·감	비고
교통신호수	주 간	인	199	2,711	증2,512
교통신호수	야 간	인	651	2,293	증1,642
계			850	5,004	증4,154

○ 공사비 현황

【금액단위 : 천원】

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
*****	*******	*******	********
***	******	*******	*******
****	*******	*********	********
*****	******	*******	*******
***	*******	*********	********

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기와 같이 교통신호수 배치에 따른 정산은 적정하므로 추후 설계변경심의를 거쳐 내역에 반영하고자 함.  끝.

붙임  1. 교통신호수 임금지급에 대한 검토보고서 1부.

2. 건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.