문서번호	토목부-10398
결재일자	2020.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	05/28 김용제
협조

서순라길 구조물깨기 물량 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 05.

도시기반시설본부

(토  목  부)

서순라길 구조물깨기 물량 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 실정보고(서순라길 구조물깨기 물량 변경)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

***********************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-121호(2020.05.25.): 실정보고건 제출(서순라길 구조물깨기 변경건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 규    모: 도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m

□ 사업기간: ’18.12.26. ~ ’20.08.31.

□ 도 급 비: 6,725백만원(1차 5,800백만원, 2차 925백만원)

**************************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 서순라길 현장확인 결과 포장두께 상이

○ 포장두께 현황

구 분		설계두께 (mm)	현 황 (mm)	증 감 (mm)	시공면적 (㎡)	물량증감 (㎥)
아스콘 포장		125	150	25	1,740	43.50
판석포장 기 초	3구역	160	180	20	21.5	0.43
			280	120	252.6	30.31
	4구역	160	220	60	277.5	16.65
	5구역	160	220	60	97.8	5.87
	소 계					53.26
계						96.76

○ 포장단면 비교표

공 종		당 초	➡	변 경
아스콘 포 장	단면도
	두 께	125mm		150mm
판 석 포 장	단면도
	두 께	160mm		180~280mm

□ 공사비 증감 현황

○ 공종별 물량증감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증.감
기계절취(토사)	B.H 0.4㎥, 야간 할증	㎥	562	509	-53
기계터파기(토사)	B.H 0.4㎥, 야간 할증	㎥	186	142	-44
잔토 운반	B.H 0.4㎥, 15D.T (현장~중간사토장,L=5.6km)	㎥	670	573	-97
아스콘포장헐기	B.H 0.4㎥,깨기 20cm미만	㎥	422	466	44
무근구조물깨기	B.H 0.4㎥,깨기 30cm미만	㎥	288	341	53
파쇄물 집적, 상차, 운반	B.H 0.4㎥,깨기 20cm미만	㎥	969	1,066	97

○ 공사비 증감현황

(단위 : 원)

****		****	****	***
* * *	****	**********	**********	*********
	*****	**********	**********	*******
	*	***********	************	*********
******		***********	***********	*********
*******		***********	***********	**********

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 서순라길 보도부 및 차도부 구조물 깨기는 현장여건을 고려 확인된 철거수량에 대하여 도급에 반영하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 상기 보고와 같이 서순라길의 포장두께 상이에 따른 구조물깨기 물량 변경은 적정하다고 판단되며,

□ 추후 설계변경시 내역에 반영하여 정산하고자 함.

붙임: 실정보고건(서순라길 구조물깨기 변경건) 제출 공문 1부.  끝.