★

문서번호	도로과-7377
결재일자	2021.4.29.
공개여부	대시민공개

담 당	도로계획담당	도로과장	건설교통국장
이윤호	어원철	유충현	04/29 임승락
협 조

｢장위중학교 후문 언덕길 낮추기 및 도로확장｣

공사 시행 계획 보고

2021. 04.

건 설 교 통 국

(도   로   과)

｢장위중학교 후문 언덕길 낮추기 및 도로확장｣

공사 시행 계획 보고

‘19년 현장구청장실 주민제안 사항인 장위중학교 후문 언덕길의

교통사고 방지를 위하여 「장위중학교 언덕길 낮추기 및 도로확장공사」시행 계획을 보고 드림.

Ⅰ		추 진 경 위

⵨ ‘19.09.17. 현장구청장실 주민제안 사항 접수

⵨ ‘19.11.06. 월곡청소년센터 리모델링 사업 실무자 회의

⵨ ‘19.11.07. 언덕 낮추기에 대한 기술검토 요청(교육지원과→도로과)

⵨ ‘19.12.06. 관련부서 실무자 회의(공원녹지과, 교육지원과, 도로과)

⵨ ‘20.04.07. 건설교통국장 현장방문 및 범위 설정(반사경실험 효과미미)

⵨ ‘20.08.18. 구청장님 현장 지시사항

⵨ ‘20.09.07. 장위중학교 언덕길 선형 조정 및 ’21년 예산확보 계획

⵨ ‘21.03.08. 장위중학교 후문 언덕길 낮추기 실시설계 용역 착공

⵨ ‘21.04.28. 장위중학교 후문 언덕길 낮추기 비교(안) 보고(구청장님)

※ ‘21.05.06. 장위중학교 언덕길 낮추기 실시설계 용역 준공 예정

Ⅱ		공 사 개 요

⵨ 공 사 명 : 장위중학교 후문 언덕길 낮추기 및 도로확장 공사

⵨ 공사위치 : 화랑로13가길 장위중학교 후문 주변

⵨ 공사기간 : 2021. 5. ~ 2021. 10.

⵨ 주요내용 : 언덕길 낮추기(60cm) 및 도로 확장공사(75m) 등

⵨ 소요예산 : 400백만원(‘21년 성북구 구소규모 편익시설 본예산)

⵨ 예산과목 : 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는                  도로관리, 구소규모 편익시설(도로) 설치공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

Ⅲ		보 고 내 용

⵨ 도로확장공사(75m) 시행

○ 장위중학교 후문 주변 도로폭이 협소(차도 6.4m)하여 교통사고 발생위험이 있어, 도로 확장 및 교통표지판(중앙차선, 교통규제봉 등)을 설치하여 장기적인 고질민원을 해소

- 차도 확장 B=5.0 ~ 7.0m → 6.0 ~ 9.0m, L=75m

○ 경사가 급한 오동근린공원 진입도로(약 24%)를 완만(약 16%)하게 낮추어 차량진입 불편해소

⵨ 언덕길 낮추기 및 지장물 이설 공사 시행

○ 장위중학교 후문 주변 도로는 현재 차선 구분이 없는 양방향 도로이며, 구릉지 정상에 위치하고 있어, 시야확보가 어려워 차량교행 시 반대편 차량을 인지하기가 어려움

○ 따라서 언덕길 상부를 기점으로 주변 건물 진입로(장위중학교 주차장 등)를 검토하여 도로를 60cm이상 낮추어 공사시행 예정이며,

○ 아울러 본공사 구간에 상수관로(D80, D200mm)가 매설되어 있어 동결심도 이상으로 이설공사 시행이 불가피한 실정임.

⵨ 월곡 청소년 문화의집 개관과 연계하여 주변 환경개선 공사 시행

○ 월곡 청소년 문화의 집 건립공사, 오동근린공원 책 쉼터 건립공사와 연계하여 환경정비공사를 시행하고자 하며,

○「2021년 구소규모 편익시설(도로포장)」사업에 포함하여 작업을 지시 시행

- 도로 재포장(보도포함) B=9.0 ~11m, L=200m

Ⅳ		향 후 계 획

⵨  2021. 05. : 장위동 언덕길 낮추기 및 선형 조정 공사 착공

⵨  2021. 06. : 지장물(상수도관) 이설

⵨  2021. 10. : 공사 준공.   끝.