“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	(주)신한알앤디
(경유)
제목	2021년 아리수올림터 모터펌프수리 작업지시(1차-작업기간 연장)

1. 시설관리과-7593(2021.4.16.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소와 귀사 간에 계약하여 시행 중인『2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)』 관련하여 아래와 같이 작업기간을 변경하오니 기한 내 완료하고 그 결과(사진첨부)를 제출하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2021년 아리수올림터 모터펌프수리 작업지시(1차)

나. 작업기간

- 당    초 : 2021. 4. 19. ~ 5. 7.

- 변    경 : 2021. 4. 19. ~ 5. 28.

- 사    유 : 안정적인 펌프운용을 위한 일정 변경

다. 작업위치 : 온수아리수올림터

라. 작업내용 : 펌프수리(3호기) 분해정비

붙임  작업지시서(1차-작업기간 연장) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	강종구		기전팀장	양창진		시설관리과장	05/04 유명은
협조자
시행	시설관리과-8601	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02)3146-4016	/전송	02)3146-4039	/	kang9@seoul.go.kr	/	부분공개(7)