투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰(서울 시네마테크 건립 전기공사)

1. 설비부-5722호(2021.4.29.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 추진 중인 「서울 시네마테크 건립 전기공사」에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한을 연기하고자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 변경내역

품명	계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당 초	변 경
배전반	12-19-2-56420-00	㈜엔피산업전기	267,955,380	*********	**********
전동기제어반	12-19-2-56418-00	㈜엔피산업전기	107,504,000	*********	**********

나. 연기사유 : 건축공사 준공기한 연기에 따른 후속공정(전기) 관급자재 납품시기 변경

다. 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 납품기한 연기 실정보고 검토서 1부

2. 합의각서 2부.  끝.

	설비부장
★주무관	임재욱		환경설비과장	김오열		설비부장	05/04 김호성
협조자	재무과장	홍은미
시행	설비부-6022	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)