문서번호	건축부-6717
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		차무흥	04/30 이창구
협조

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

건설사업관리용역 실정보고 검토보고

2021. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

- 시립마포 실버케어센터 건립공사-

건설사업관리용역 실정보고 검토보고

「시립마포 실버케어센터 건립공사」건설사업관리용역 관련 “건축분야 건설사업관리자 추가 배치” 승인 요청이 접수되어 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 (창업허브단지 조경공사 포함) 건설사업관리(감독권한대행)(장기3차)

*********************************************************************

*****************************************************

□ 용 역 자 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소(대표:박재형) 외 1

	건립개요
위 치 : 마포구 백범로31길 21 (舊 한국산업인력관리공단 부지) 규 모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡ (서울창업허브단지 조경공사 포함) 총사업비 : ***************************************** ****************************** 공사기간 : 2019. 04. 15. ~ 2021. 12. 14. (32개월) 용 도 : 노유자시설(노인복지시설)

Ⅱ		추진경위

□ 2019.04.01. : 제1차 용역착수(계약체결: ‘19.03.19.)

□ 2019.07.05. : 제1회 변경계약체결(공정에 따라 상주감리원 배치 조정)

□ 2020.03.02. : 제2회 변경계약체결(안전감리원 추가 배치 등)

□ 2020.06.02. : 제2차 용역착수

□ 2020.08.24. : 제3회 변경계약체결(물가변동에 따른 계약금액 조정)

□ 2021.02.01. : 제3차 용역착수

Ⅲ		계약변경 검토

□ 관련근거

- 건축 건설사업관리기술인 추가 배치 승인요청

(유탑 관리팀 21- 415호, ‘21.04.28.)

□ 변경사유

- (현황) 건축 건설사업관리기술인 1명이 배치, 사무보조원이 없는 상태에서 건축분야 공정, 품질, 사업관리, 행정업무 등 수행 중임

-  (사유) 1. 마감공사 본격 착수에 따른 업무량 증가

2. 품질향상 및 실내인테리어 경험자 배치 필요

3. 행정처리 업무 증가에 따른 사무보조 필요

□ 변경내용 : 건축초급 감리원 추가 배치

분야	성명	등급	배치예정일	비고
*****	***	**	****************	************

□ 계약내용 변경

- 금액변경***************

구 분	당 초	변 경	증감	비고
**	**************	**************	************
**	************	**************	************

Ⅳ		처리의견

□ 건축(초급) 건설사업관리기술인 추가배치 요청사항에 대하여 승인하여 사업 종료시까지 건축공사 품질 및 공정관리에 철저를 기하도록 하고 추후 계약변경(총무부) 의뢰하고자 함.

붙임: 건축 건설사업관리기술인 추가 배치 승인요청 1부. 끝.