문서번호	전산통신과-1766
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	통신연구팀장	전산통신과장		서울종합방재센터소장
임철혁	김영욱	임경석		05/04 김선영
협 조
	장비관리팀장		윤여일
	담당자		장순성

『서울을 안전하게 시민을 행복하게』

「2021년 휴대용 무전기 배터리 구매」

계약변경(기간연장)계획 보고

2021. 5.

전산통신과

(통신연구팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『서울을 안전하게 시민을 행복하게』

「2021년 휴대용 무전기 배터리」계약변경(기간연장)계획 보고

휴대용 무전기 배터리 구매와 관련하여 공급업체가 수입을 진행하는 과정중 전세계 코로나 바이러스 영향으로 수입 물류 스케쥴이 대폭적으로 취소 또는 축소됨과 관련하여 납품기한 연장을 요청함에 따라 계약변경(기간연장)을 시행하고자 함.

1		관련근거

서울시 재무과-7085(2020.02.12.)호「신종 코로나바이러스 감염증 관련 계약집행 운영요령 안내」

전산통신과-179(2021.01.15.)호「2021년 무선국 허가 관련 수수료 및 통신장비 소모품 사용 계획」

전산통신과-1254(2021.03.31.)호「2021년 휴대용 무전기 배터리 구매 발주 계획」

전산통신과-1427(2021.04.09.)호「2021년 휴대용무전기 배터리 구매 계약 체결 결과보고(통보)」

2		계약변경 개요

사 업 명 : 2021년 휴대용 무전기 배터리 구매

계약기간 : 2021. 4. 9.(금) 〜 5. 9.(일) (변경 전)

2021. 6. 30.(수) (변경 후)

계 약 자 : 주석월드

계약금액 : 금28,004,790원

사업내용 : D-TRS무전기 배터리 150점, UHF무전기 배터리 150점

3		향후일정

수입 물류 선적 예정일 (6월 15일)

확보된 수입 물류 한국 도착 에정일 (6월 15일 ~ )

계약물품 납기 예정일 (6월 30일 전까지)

4		행정사항

납품지연에 따른 지연배상금 적용 제외 요청 (계약변경)

납품기한 연장 요청(6월 30일까지)

붙임  휴대용 무전기 배터리 구매 계약 체결 결과 보고(통보) 1부.

계약업체(주석월드) 납품기한 연장 요청 공문 1부.  끝.