문서번호	설비부-6101
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	05/06 김호성
협 조

- 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치사업 -

전기공사 실정보고 승인검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 05.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치사업 -

전기공사 실정보고 승인검토

『고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치 전기공사』관련 경관조명 추가 등 인수기관 요청사항 반영 등에 대하여 건설사업관리단으로부터 실정보고가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

***********************************)

**********************************

**********************************

************************************

************************

***************************************

****************************************************

*********************************

***********************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치 전기공사

공사위치 : 강동구 강일동 아리수로(고덕교)

공사내용 : 고덕교 확장 및 보도교 2개소 신설에 따른 전기공사 1식

공사기간 : 2019. 3. 26. ~ 2021. 9. 30.

도 급 비 : ****************************

도 급 자 : *********

감 리 자 : *****************

Ⅲ
		설계변경 사항

변경사유

**********************

**************************

**********************

******************************

**************************************

************

*************************************************************

추가 설치 요청사항 기존 반영사항
․ 고덕교 하부 경관조명 추가	․ 외곽순환도로 하부 강동구 경관조명 설치(안) → 계획된 보행등 4본 물량 삭제

주요 변경물량 및 공사비 증감현황

****************

공종 및 내용	품 명	규 격	단위	수 량		증 . 감	비고
				당 초	변 경
***** ****** ********** **********	***	***********	*	***	***	**
	***	***********	*	***	***	***
	***	***********	*	***	****	***
	***	*************	*	***	***	****
	***	*************	*	***	***	****
	********	*************	*	*	**	**
	********	*************	*	***	***	***
	********	***************	**	*	*	***
	********	**********	*	*	*	***
	*******	******	*	**	**	**
	******	********	*	*	**	**	**
***** ***** ******** ****	********	*********	*	*	*	*
	*****	*********	*	*	*	*
	*****	*******	*	*	*	*
	*********	*****	*	*	*	*
	*****	***************	*	*	*	*

***************

******		****	****	*****	***
**** * * *	*************	*********	*********	*
	***********	**********	**********	***********
	*****************	**********	**********	*
	*************	**********	**********	***********
	*******	**********	***********	************
*****		**********	**********	***********
*******		*******	*******	*
****		*	*********	***********
*****		***********	***********	************
*****		**********	**********	************
****		***********	***********	************

Ⅳ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

*********************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************************

조치계획

*****************************************************************************************************

**********************

***********************