문서번호	한양도성도감-4323
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		이원재	05/06 안중호
협 조

2차 공사 실정보고 검토결과 보고

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관 - 13회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

문  화  본  부

(한양도성도감)

2차 공사 실정보고 검토결과 보고

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관 - 13회)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관」조성공사와 관련하여 해당 감리자로부터 제출된 실정보고 사항에 대한 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공사명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 조성공사

□ 위  치: 중구 소파로 46외 13필지(43,630㎡)

□ 계약금: 3,528,933,000원

□ 공사기간: 2018.11.23. ~ 2021.12.15.

□ 시공자: 원택건설(주) 대표 ***, 명헌건설(주)

□ 감리자:(주)금성종합건축사사무소 대표 **************

Ⅱ		실정보고 내용

□ 실정보고 근거

- 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제13조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)

□ 실정보고 사유(우리시 추가공사 요청 사항)

- 방공호 철문설치 및 자연석 박석깔기(방공호 안전관리)

- 전시관 진입로 화강석 판석 두께증가(t:50mm→ t:100mm)

- 순성로 주변 회향목 식재, 화장실 주변 사철나무 식재(유구보호)

- 목재난간 및 철재난간 설치(유구보호 및 관람객 안전시설)

- 잔디배수로, 집수정, 우수관로 추가설치(집중호우 대비 배수시설)

□ 감리자 검토의견

※ 남산감리 감리검토의견서 제20-14호

- 분야별 공사비 증감액은 도면, 수량산출 등 적정하게 산정·검토되었음

□ 설계변경 추정내역

(단위:원)

공 종	변경전	변경후	공사금액		비 고
			변경전	변경후
건축	-	방공호 철재문설치	-	5,998,848	증)5,998,848
조경	개나리 16주 댕강나무 9주 덜꿩나무 29주 미선나무 5주 분꽃나무 10주 조팝나무 16주 철쭉 9주 구절초 273본 기름새 276본 돌단풍 22본 띠 950본 마타리 342본 물싸리 94본 비비추 16본 산국 382본 앵초 36본 사철나무 0주 회양목 0주 맥문동 0본 잔디 580.6㎡ 잔디수로 0m	개나리 0주 댕강나무 0주 덜꿩나무 9주 미선나무 0주 분꽃나무 0주 조팝나무 0주 철쭉 259주 구절초 173본 기름새 0본 돌단풍 0본 띠 0본 마타리 0본 물싸리 0본 비비추 0본 산국 142본 앵초 0본 사철나무 650주 회양목 2,600주 맥문동 3,500본 잔디 2,641.8㎡ 잔디수로 518m	152,320 182,529 595,080 105,555 340,510 186,384 243,657 330,876 829,380 32,582 1,151,400 567,720 282,470 18,960 531,744 59,760 - - - 4,984,381 -	- - 184,680 - - - 7,011,907 209,676 - - - - - 197,664 - 5,452,150 25,428,236 3,673,197 22,679,783	감)152,320 감)182,529 감)410,400 감)105,555 감)340,510 감)186,384 증)6,768,250 감)121,200 감)829,380 감)32,582 감)1,151,400 감)567,720 감)282,470 감)18,960 감)334,080 감)59,760 증)5,452,150 증)25,428,236 증)3,673,197 증)17,695,402 증)2,915,098
조경 식재부대 (내역오류 조정)	유기질 비료 (20㎏/㎡) 5,182.35㎡	유기질 비료 (7㎏/㎡) 6,143.6㎡	6,718.399	-8,591,688	감)15,310,067 1차 준공분 감액 추가
	유기질 비료 (15㎏/㎡) 1,818.88㎡	유기질 비료 (5.25㎏/㎡) 3,912.07㎡	5,953,386	-6,070,813	감)12,024,199 1차 준공분 감액 추가
포장공사	화강석 판석 t50 342.94㎡ 화강석 판석 t100, 0㎡ 레미콘 타설 0㎥ 레미콘 0㎥ 와이어메쉬 0㎡	화강석 판석 t50, 0㎡ 화강석 판석 t100, 342.94㎡ 레미톤 타설 342.94㎥ 레미콘 34.98㎥ 와이어메쉬 342.94㎡	51,928,412 - - - -	- 68,584,282 1,243,595 2,778,251 994,182	감)51,928,412 증)68,584,282 증)1,243,595 증)2,778,251 증)994,182
자연석 쌓기	전시관 진입부 자연석쌓기11.52㎡ 방공호 진입부 박석깔기 0㎡	전시관 진입부 자연석 쌓기 40.02㎡ 방공호 진입부 박석깔기 9.75㎡	3,349,979 -	5,885,540 1,630,868	증)2,535,561 증)1,630,868
배수공사	빗물받이 2개 우수관 89.48m 아스콘포장 0㎡ 터파기 0㎥ 쇄석포설 0㎥ 레미콘 타설 0㎥ 레미톤 0㎥	빗물받이 9개 우수관 129.48m 아스콘포장 92.82㎡ 터파기 37.86㎥ 쇄석포설 10.1㎥ 레미콘 타설 10.1㎥ 레미톤 10.3㎥	95,636 3,082,048 - - - -	430,362 4,459,808 1,087,269 126,639 32,127 366,296 767,058	증)334,726 증)1,377,760 증)1,087,269 증)126,639 증)32,127 증)366,296 증)767,058
난간설치	목재난간 0m 철재난간 0m (기존 279.53m)	목재난간 278m 철재난간 235m (279.53+235=514.53)	- -	52,765,568 26,224,628	증)52,765,568 증)26,224,628
합 계 (직접공사비)			82,231,850	226,973,912	증)144,742,062
석재 시험비		석재시험비 (강도, 석면함유 등)	-	415,000	증)415,000

Ⅲ		처리의견

□ 우리시의 요청에 따른 추가공사에 대한 실정보고 사항과 내역 오류수정(조경용 비료 수량 공제)을 반영하는 내용이며 감리원의 검토결과 공사비의 증감액은 적정하게 조정·산정되었으므로 실정보고 승인하고 향후 계약심사를 거쳐 설계변경처리하고자 함

붙임 1. 감리원 검토의견서 1부

2. 시공자 실정보고서 1부.  끝.