“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	기획예산과장
(경유)
제목	생산부 소관 사업 예산 조정 및 변경 배정요청 (시설비 및 부대비)

1. 생산관리과-4638(21.4.28) 관련입니다.

2. “강북정수센터 배출수처리시설개선사업”의 사업변경으로 연내 집행이 불가한

예산의 효율적 활용 및 생산시설의 생물체 유입차단 관련 사업의 신속 추진

등의 사업추진을 위하여,

3. 아래와 같이 관련 예산을 조정 및 변경하여 사업을 추진코자 하오니 조치하여        주시기 바랍니다.

○ 대상사업 : 정수센터시설정비, 강북고도정수처리 확장공사

○ 사    유 : 집행불가 예산 활용 예산 미편성 긴급 사업 신속추진

- 정수센터시설정비(강북정수센터배출수처리 시설개선) 연내 집행불가 예산 1,650백만원         강북고도시설확장 및 생산공정 최적화용역 등 신규사업 조정 및 변경 추진

- 예산 조정 및 변경(안)                                        (기준일 4.27현재 단위:백만원)

사 업 명			예산현액	집행액	예산 조정(안)		조정 · 변경 후 예산현액
					감ㆍ배정	증ㆍ배정
계			11,987	1,394	1,650	1,650	11,987
정수센터 시설정비	기존	강북 배출수처리 시설개선	3,000	178	1,650	-	1,350
	신규	재건설관련 생산 공정최적화 용역	-	-	-	200	200
강북고도처리시설 확장공사(역세척 단축)			8,987	1,216	-	1,450	10,437

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 정수센터시설정비, 시설비 및 부대비

자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 강북고도정수처리시설 확장, 시설비 및 부대비

첨부 : 사업예산 조정 및 변경 관련예산 관련 방침서. 끝

	생산부장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	05/06 서대훈
협조자
시행	생산관리과-4867	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)