문서번호	시설관리과-11315
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최성현		김대용	05/06 송병욱
협조

「2020년 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(최종, 2차) 계획 보고

2021. 5.

동부수도사업소

시설관리과

「2020년 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(최종, 2차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 「***********************************」과 관련 물량 증·감에 따른 설계변경(최종, 2차) 검토내용을 보고 드림.

1		용 역 현 황

□ 용 역 명: ****************************************

□ 용역개요: ******************************

□ 계약금액: ************

□ 용역기간: 2020. 7. 29.~2021. 6. 30.

□ 도 급 자: ***************

2		보 고 내 용

□ 설계변경(최종, 2차) 시행

❍	「**********************************」과 관련하여 건설폐기물 운반 및 처리 수량의 변경(증가)으로 아래와 같이 설계변경(준공)하고자 함

❍	설계변경 현황

구분	운반(㎥)	처리(t)	용역비(천원)	비고
당초	*****	******	*******	1차수 미정산
변경	*****	******	*******

❍	수량 및 용역비 증·감 현황

구분	운반(㎥)	당초	변경	증·감	비고
건설 폐기물 운반 (㎥)	폐아스콘	***	***	************
	폐콘크리트	***	***	************
	폐토석	*****	*****	************
	계	*****	*****	************
건설 폐기물 처리 (t)	폐아스콘	*****	*****	************
	폐콘크리트	*****	*****	************
	폐토석	*****	*****	************
	계	*****	******	************
용역비(천원)		*******	*******	***********

❍	공사현장별 증·감 현황

구분	공종	공사현장(당초, 변경)
		휘경동외 4개동	제기동외 5개동	묵1동외 7개동	망우본동외 8개동	중랑, 동대문구 시설물공사	동부관내 누수복구공사	전농동외 4개동
건설 폐기물 운반 (㎥)	폐아스콘	110	207	87	163	56	250	-
		118.72	89.79	39.08	41.29	30.79	252.77	91.91
	폐콘크리트	98	84	61	79	90	93
		123.91	72.10	162.63	41.22	71.59	245.65
	폐토석						1,298	-
							3925.88	293.77
건설 폐기물 처리 (t)	폐아스콘	258.5	486.5	486.5	383.1	131.6	587.5	-
		279	211	91.83	97.03	72.36	594	216.53
	폐콘크리트	225.4	193.2	140.3	181.7	207	213.9
		285	165.84	374.04	94.81	164.65	565
	폐토석		-				2,206.6	-
			117.49				6,674	499.41

❍	공사현장별 증·감 현황

- 연간단가 공사장별 현장실정(물량증감, 도종변경 등)에 따른 폐기물량 물량증감 및 동부관내 대형관 누수에 따른 폐토석 운반, 처리량 증가

3		조 치 계 획

□ 상기와 같이 폐기물 처리 물량 증·감 발생에 대하여 우리 사업소 자체 설계변경 심의를 통하여 타당성 여부 등을 검토하고
-관련근거: 안전총괄과-659(2020.01.17.) 2020년 상수도사업 계약심사 추진계획

□ 심의 결과에 따라 용역 변경 계약 후 준공(기성) 처리하고자 함

붙임  1) 공사장별 폐기물 반출 수량 1부.
2) 변경내역서 1부.  끝.