문서번호	도시철도사업부-4255
결재일자	2021. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
정영호		최문기	05/07 이철
협 조
	정보통신과장			김이곤
	설비계획과장			장병선
	궤도과장			허동
	주무관			이덕배
	주무관			원길묵

신림선 도시철도 통합공정회의 결과 보고(´21. 4월)

2021. 04.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

신림선 도시철도 통합공정회의 결과 보고(´21.4월)

신림선 도시철도 건설공사의 효율적인 공정관리를 위해 통합 분야(토목․건축․궤도․E&M 등) 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 배  경

○ 효율적 사업관리 및 준공일 준수를 위해 분야별 공정관리 추진사항 점검 및 논의

□ 회의 개요

○ 일    시 : ´21. 05. 03.(월) 14:30 / 본부 10층 회의실

○ 참 석 자

- 본  부 : 도시철도사업부(부장, 공정관리과장), 도시철도토목부(궤도과장),
도시철도설비부(설비계획과장, 정보통신과장)

- 현  장 : 사업시행자(사업관리팀장), 건설사업단장, 설비분야 책임감리원

※코로나19 확산방지를 위해 현장관계자 참석 최소화 조치

□ 공정 추진현황

○ 공정률 현황

<기준일 : ´21. 03. 14.>

구분	총괄	1공구	2공구	3공구	사업단
실적 공정률 (계획, 대비)	****** ****************	****** ****************	****** *****************	****** *****************	****** ****************
*부진공정 만회대책 협의체 2단계 운영중

○ 계획 대비 공정률 현황 (최근 4개월)

*****************************************************

****

□ 회의 결과

○ 현장 관계자

- 우선 시운전 및 종합시험운행을 위한 선행공정(토목, 건축) 턴오버일정 준수 당부

- *******************************될 수 있도록 협조 요청

- 기계연동시험을 위해 ************************************* 요청

○ 사업시행자(건설사업단)

- **************************주행로 연마, 안내 레일 등에 대한 중점 관리 시행

- ******************하여 개별 시험에 차질 없도록 준비 예정

○ 본부 당부사항

【공정관리·공사 분야】

- 일부구간 턴오버일정 변경되었으니, 현재 협의된 기준의 턴오버 일정 반드시 준수

- *************************************** 필요

- 소방시설 및 승강기 완공검사 필증이 계획 일정대로 교부 될 수 있도록 선행공종 관리 철저

- 분야별로 소통 하여 공종별 동시 작업 시행 등 상호 협력하여 진행하는 것이 필요

- 코로나로 인해 공정 차질 등 많은 문제점이 발생되지 않도록 현장 대응 수칙 준수 철저

- 시설물 인수인계를 위한 관계기관 협의시 감리단에서도 적극적으로 참여하여 진행 당부

□ 조치계획

○ ‘목표 개통 일정’ 달성을 위해 공사 지연 없도록 공정·안전관리 중점 추진

○ 금번 회의시 개진된 ‘현장 요청사항 및 본부 당부사항’은 사업자·현장 통보 조치

붙  임 : 1. 공정회의자료(통합 및 건설사업단) 각 1부

2. 현황사진 및 참석자 명단 각 1부.  끝.