문서번호	생활환경과-7302
결재일자	2021. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정1부시장 방침 제98호

						시 민
주무관	음식폐기물관리팀장		생활환경과장		환경에너지기획관		기후환경본부장	행정1부시장
신정현	이재용		임미경		엄의식		정수용	05/07 조인동
협 조
	물순환안전국장					최진석
	예산담당관					김재진

서남 음폐수 바이오가스화사업 변경계획

2021. 5.

기후환경본부

(생활환경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서남 음폐수 바이오가스화사업 변경계획

하수처리 여건 변화와 시설 중복투자 방지를 통한 사업의 효율성 제고를 위하여 서남 음폐수 바이오가스화사업 계획을 변경 추진하고자 함

※ 변경계획 : 바이오가스화시설 건립 → 하수 연계처리(음폐수 처리시설 보강)

Ⅰ		추진현황

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ’16. 11. ~ ’25. 12.

❍ 사업위치 : 강서구 마곡동 101번지(서남물재생센터 내)

❍ 사업면적 : 부지 9,282㎡/연면적 14,466㎡(지상 2층, 지하 2층)

❍ 시설규모 : 음폐수 300톤/일(강서구 등 16개 자치구 음폐수)

❍ 총사업비 : 729억원(국비 193, 시비 339, 구 197)

□ 추진경과

❍	*************	****************
❍	’18.1.	음폐수 바이오가스화시설 건립 추진계획(본부장)
❍	*************	************************
❍	*************	********************
❍	**************	*********************
❍	’20.12.~’21.3.	음폐수 연계방안 협의(물재생시설과, 물재생시설공단)
		- 음폐수 오염도 최소화 연계 및 반류처리시설 개량

Ⅱ		변경계획

□ 변경사유

❍ 음폐수 연계처리 환경변화 : 수질영향 감소, 안정적 방류수질 확보 가능

- 서남센터 총인처리시설 설치 : ’21년 상반기 1단계(50%) + ’27년 2단계(50%)

- ’21년부터 적용 예정이던 ‘하수처리시설 방류수질 강화 기준’ 유예 결정에 따라 하수처리 부담 완화(’27년까지 강화기준 유예)

❍ 서남센터 기존 하수 처리설비 활용을 통한 재정투자 합리화 필요

- 바이오가스설비, 수처리설비 등 시설 대부분이 기존 하수시설과 중복

- 유지관리 인력의 중복 투입 및 전문성 확보 어려움에 따른 비효율 발생 우려

❍ 서남센터 바이오가스 수요량 증가에 따른 증산 필요성 부각

- 기존시설 연료용 가스 부족, 하수건조시설(270톤/일, ’21년) 증설에 따라 가스 부족 심화

- 신재생에너지 생산 전략(물재생센터 비전 3.0)에 따른 음폐수 활용도 증가

□ 주요내용

구  분

기존계획

변경계획

시행주체

기후환경본부(자치구 참여)

물순환안전국(물재생시설공단)

사업기간

’16 ~ ’25년

’21 ~ ’24년

시설계획

위치

물재생센터 내 별도 부지

물재생센터 내 부지

규모

음폐수 300톤/일

음폐수 330톤/일

공정

바이오 · 생물학적 처리

(하수처리와 별도 공정)

반입	→	소화	→	가스화
		↓
		탈수	→	생물 처리	→	하수 연계

물리적 처리

(하수처리 보조 공정)

반입	→	하수 연계	+	시설 보강

【시설 보강(연계오염도 저감)】

저장조 및 악취저감시설, 유분제거시설

기존 반류수 처리시설 개선

음폐수 정제시설 설치(시범) 등

관리방식

시․자치구(공동 운영)

물순환안전국(물재생시설공단)

소요예산

*****

*******

□ 추진계획(시설보강)

❍ 음폐수의 효율적 처리를 위한 반입 저장조, 유분분리시설, 정제시설 설치

- 음폐수 오염부하 평준화 및 소화조 바이오가스 생산량 조정을 위한 저장조 신설

- 유분으로 인한 배관폐쇄, 소화효율 저하방지를 위한 유분분리시설 등 1차 전처리 시설

- 음폐수 오염도 감소방안 마련을 위한 정제시설 등 2차 전처리 시설 도입(시범)

※ 정제시설 : 유분 제거, 필터링하여 오염도를 감소시키는 시설로서 정제물은 유기탄소원 또는 바이오가스 증산제로 활용

❍ 하수처리 영향 최소화를 위한 반류수 처리시설 및 이송배관 보강

- 2처리장 반류수 처리시설(MLE 등) 및 반류수 이송배관 개량

하수슬러지 농축, 소화, 탈수 및 정화조 처리공정에서 발생하는 상징액, 탈리여액(탈수과정에서 발생하는 오수) 등의 반류수를 장기폭기 등을 방법으로 오염도를 저감하여 하수처리공정으로 유입하는 시설

❍ 저장조, 전처리시설 신설에 따른 악취저감시설(탈취기, 운반차량 세차시설 등) 설치

〔 사업비 산출내역(추정) 〕

(단위 : 백만원)

******		**	***	****
****			******
***********		*	******
	***********	*	*****	********
	***********	*	*****	***********
	**************	*	*****	**********
**************		*	*****
	**************	*	***	*************
	*********	*	*****	**********
**************		*	******
	******************	*	*****
	*********	*	*****
*************		*	*****	****************

Ⅲ		행정사항

□ 협업계획 : 사업의 효율적 추진 및 성과 제고

❍ 기후환경본부(생활환경과)

- 용역 및 공사 소요예산 편성 및 집행 관리

*************************************************

- 사업추진 전과정 참여 의견 개진 및 음폐수 반입 쿼터 조정 등

❍ 물순환안전국(물재생시설과, 물재생시설공단)

- **********************

- 전처리시설 사전 효과 검증을 위한 테스트 실시

□ 후속조치 : 계획변경에 따른 추가 협의 진행

❍ 음폐수 반입량 및 운영비용, 사업부지 활용방안(물순환안전국)

- 음폐수 전처리 시설 도입에 따른 음폐수 반입처리량 증대방안

- 음폐수 처리수수료 부과방법 보완(하수도 조례 개정)등을 통한 운영비 충당방안

- *****************************************************

***********************************************************************

❍ **************************************

- 기존참여(15개 자치구) 및 신규참여 희망 자치구 의견수렴

□ 향후 추진일정

❍	’21.5.~12.	변경 방침 및 기본계획 용역
❍	’22.1.~12.	기본 및 실시설계 용역
❍	’23.~’24.	시설 보강 공사 시행

붙임 1. 서남 음폐수 연계처리시설 보강 산출내역(안) 1부

2. 자치구별 서남 바이오가스시설 건립비 분담현황 1부.  끝.