투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 도시철도 통합공정회의(´21년 4월) 결과 알림

1. 도시철도사업부-3535호(2021.04.13.)와 관련입니다.

2. 신림선 건설공사의 적기 완공을 위해 실시한 [´21년 4월 신림선 통합공정회의] 결과를 알려드리니, 회의시 논의된 사항이 이행될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회의결과

1) 사업시행자 및 현장 관계자 요청사항

∘ 우선 시운전 및 종합시험운행을 위한 선행공정(토목, 건축) 턴오버일정 중점 관리 필요

∘ *******************************될 수 있도록 협조 요청

∘ 기계연동시험을 위해 ************************************* 요청

∘ **************************주행로 연마, 안내 레일 등에 대한 중점 관리 시행

∘ ******************하여 개별 시험에 차질 없도록 준비 예정

2) 본부 요청사항

∘ 일부구간 턴오버일정 변경되었으니, 현재 협의된 기준의 턴오버 일정 반드시 준수

∘ *************************************** 필요

∘ 소방시설 및 승강기 완공검사 필증이 계획 일정대로 교부 될 수 있도록 공정 관리 철저

∘ 분야별로 소통하여 공종별 동시 작업 시행 등 상호 협력하여 진행하는 것이 필요

∘ 코로나로 인해 공정 차질 등 많은 문제점이 발생되지 않도록 현장 대응 수칙 준수 철저

∘ 시설물 인수인계를 위한 관계기관 협의시 감리단에서도 적극적으로 참여하여 진행 당부

붙  임 : 통합 공정회의자료 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,도시철도건축부장,도시철도설비부장,남서울경전철(주) 대표이사 귀하,신림선 1~4, 궤도, 설비분야 책임감리원 귀하,신림선 1~3공구 현장대리인 귀하
주무관	정영호		공정관리과장	최문기		도시철도사업부장	05/07 이철
협조자
시행	도시철도사업부-4294	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7162	/전송	02-772-7305	/	elete123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)