문서번호	시설관리과-10993
결재일자	2021. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	★시설안전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
유형근	유세종	김상웅		05/10 김정애
협 조
	급수운영과장		代박장진
	급수관리팀장		이훈재
	기전팀장		양경현
	주무관		이희철

2021년 여름철(풍수해)대비 상수도 시설물 안전점검 계획

2021. 5.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2021년도 여름철(풍수해) 대비

상수도 시설물 안전점검 추진계획

여름철에 발생하는 풍수해 등으로 인한 안전사고를 사전에 예방하고자 「2021년 풍수해 대비 상수도 시설물 안전점검」계획을 보고 드림

※ 관련 근거 : 2021년 여름철 풍수해 대비 운영계획 [안전조사과-4078(’21. 4. 23.)]

2021년 여름철(풍수해) 대비 상수도시설물 안전점검계획[시설과-4783(’21. 5. 7.)]

□ 안전점검 대상

○ 상수도시설물 : 87개소                            (2021.5월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	무인	증 압	현수관로	공동구
22	2	20	43	18	25	22(0.76)	-

□ 점검 기간

❍ 점검기간  : 2021. 5. 13.(목)~ 5. 31.(월), 사업소 자체점검

- 본부․사업소 합동점검 : 2021. 5. 13(목) ~ 14.(금)

❍ 정비기간  : 2021. 5. 13.(목)~ 6. 4.(금)

□ 점검 방법

< 본부․사업소 합동점검 >

❍ 점검 대상

- 배수지 22개소

❍ 합동점검 일정

사업소	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
일자	5.13~5.14	5.17~5.18	5.20	5.21	5.24	5.25~5.26	5.27	5.28

* 특고압수전 아리수올림터 점검 별도 협의

❍ 점 검 자

- 본부 ┍ 시설분야 : 조익승, 조인영, 김광준

┕ 기전분야 : 문강수, 오충환

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

❍ 점검내용

- 배수지 방충망 설치 및 규정준수여부(1.2차 출입구,창문,환기구,환풍구 등)

- 항 출입구와 관랑실 연결통로 차단상태 확인

- 배수지 구조물 및 주변 축대,옹벽,담장등 침하,균열,변형 발생여부 등

< 사업소 자체점검 >

❍ 점검계획을 수립하여 실시

- 점검반 구성, 운영기간, 활동내용, 점검대상 등을 포함한 세부계획 수립

- 가압장 점검은 기전담당과 합동점검 시행

❍ 점검 대상

- 1․2차 배수지

- 유․무인 가압장

- 노출 상수도관(현수관로 등)

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 누수 발생 여부 등

□ 점검시 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검

□ 행정 사항

❍ 사업소별 추진계획을 수립하여 점검 시행하고 점검 결과를  시설관리과 수합 보고

- 보고일시 : 점검결과[‘21.6.4.(금)],조치결과보고[’21.6.11.(금)]

❍ 사업소와 긴급 복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 사업소별 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 점검표 1부.

3. 배수지 시설 점검표 1부.  끝.