문서번호	토목부-8905
결재일자	2021. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이준범		박일연	05/10 김용제
협조

차량방호책 설치 검토보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

2021. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

차량방호책 설치 검토보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

『고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사』의 실정보고(고덕교 보도(#2) 가드레일 설치)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

***************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감 2021-42호(2021.05.03.): 실정보고(#2 가드레일 설치건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사

□ 규    모: 고덕교 차도확장(4차로 →6차로), 교량접속 캔틸레버 보도

설치(교량 양측 각 B=2.5m)

□ 사업기간: ’19.01.18. ~ ’21.06.30.

□ 도 급 비: 2,754백만원(1차 2,050백만원)

***********************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 실정보고 사유

○ 차로 확폭(왕복4차로→왕복6차로)으로 인한 기존 강일교 하부의 교각과확폭도로가 근접해짐에 따라 안전사고 예방을 위한 차량방호책 설치 필요

- 안전사고예방을 위한 차량방호책 설치요청

· 한국도로공사 도로안전팀-1220(`20.05.19.)호

□ 방호울타리 설치

○ 2021년 국도건설공사 설계실무요령 반영

□ 현황사진

확장 전	확장 후

□ 현황도

설치 평면도

□ 물량 및 공사비 증감 현황

○ 수량 증감내역

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
노측용 가드레일	W4000 * H760	경간	-	21.0	21.0
라운드레일 노측용가드레일	단부-라운드레일	개소	-	2.0	2.0

○ 단가적용

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	산출금액	적용금액	비고
노측용 가드레일	W4000 * H760	경간	******	******
라운드레일 노측용가드레일	단부-라운드레일	개소	******	******

※  신규비목 적용

▸ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 및 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)  ⇒ 신규 산출단가 : 협의율 적용(93.387%)

○ 공사비 증감현황

(단위 : 천원)

*****		****	****	***
* * *	****	*	*****	*****
	*****	*	***	***
	*	*	*****	*****
*****		*	*****	*****
*******		*	*****	*****

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 차로 확장으로 기존 강일교 하부의 교각들이 차도와 근접되어, 차량운행으로 인한 교통사고 발생시 피해규모 및 인명피해가 예상되므로 보호조치가 필요함.

○ 국도건설공사 설계실무요령 등에 의거하여 차량방호책을 설치하여 탑승자의 안전과 구조물의 보호를 강구함이 타당함.

○ 단가 및 수량 산출 검토 결과 적정하며, 추후 설계 변경시 실물량 정산후 설계변경 반영이 필요한 사항임.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 교각 및 차량 탑승자, 보행자 안전을 위한 차량방호책 설치는 타당함.

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자 함.

붙임  실정보고(보도(하남방향) 보강토 옹벽 설치) 공문 1부.  끝.