문서번호	도시철도과-5348
결재일자	2021. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도시철도혁신팀장	도시철도과장	교통기획관		도시교통실장
류현석	오성균	이창석	여장권		05/12 백호
협 조

- 교통약자 등 지하철 이용자 이동편의 제공을 위한 -

2021년 승강편의시설 설치계획

2021. 5. 7.

도시교통실

(도시철도과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 교통약자 등 지하철 이용자 이동편의 제공을 위한 -

2021년 승강편의시설 설치계획

교통약자 등 지하철 이용자의 편의 제공을 위해 ‘21년 지하철 1~8호선 승강편의시설 설치 세부계획을 수립하여 추진코자 함

1		추진 개요

□ 추진 근거

○ 교통약자의 이동편의증진법 제9조(이동편의시설의 설치 대상)

○ 지하철 이동편의시설 확충 종합계획(시장방침 537호, ’07.10.4.)

- 우선순위(1역 1동선 미확보 역중 E/L 설치가능 역 등) 의거 단계별 승강편의시설 확충

○ 제3차 市 교통약자 이동편의 증진계획(행정1부시장방침 384호, ’18.8.1.)

- ’22년까지 全 역사 1동선 확보 엘리베이터 100% 설치

○ 교통공사 설립 및 운영 조례 제4조(자본금), 제32조(보고 및 검사 등)

□ 추진 경위

○ ’21. 2. 19.: 지하철역 승강편의시설 설치사업 관련 추진계획(市)

- 교통공사 설계중 공사비 증액, 투자심사(총사업비 40억 이상) 12개소 발생

○ ’21. 3. 24.: 출자금 지급(市)

*********************************

○ ’21. 2. ~ 3.: 1동선 확보관련 면담회 개최(2회, 市-장애인차별철폐연대)

- 추경 전 설계완료 대상지에 대해 ‘21년 추경 편성 등 요구

○ ’21. 4. 9.  : ‘21년 승강편의시설 사업 추진계획(교통공사)

- 국비매칭사업 종료 시기(‘21) 도래에 따른 1역사 1동선 미확보 역사에 대한 사업비(설계중 12역 공사비, 지속검토 4역 설계비·공사비) 마련필요

○ ’21. 5. 4.  : 투자심사 대상지 변경제출(교통공사) ※당초 12→변경 14건

2		일반 현황 (‘21. 4. 기준)

예산현황 및 진행상황

□ 예산편성(예산심의) 사업

○ 출자금 예산 (공사)

- (편성) ‘14~’21년까지 E/S 및 E/L 104개소 186대 연간 누적 사업비(설계·공사비) ***********

□  E/S 79개소 161대 94,000백만 원, E/L 25개소 25대 24,190백만 원

- (실적) ‘17~’20년까지 E/S 및 E/L 12개소 19대 연간 설치 누적 사업비(설계·공사비) **********

□  E/S 8개소 15대 *******, E/L 4개소 4대  **********

- (기타) 공사 중 및 공사예정 등 **********

□ E/S 및 E/L 공사 중 21개소 38대, 연간 설치 누적 사업비 **********

□ E/S 및 E/L 공사예정 등 71개소 129대 **********

(단위: 백만 원)

구 분		편 성 (‘14.~’21.)	추진현항
			설치완료 (‘17.~’20.)	공사 중	기 타 (공사예정 등*)
누적사업비		*******	******	******	******
설치규모	개소	***	**	**	**
	대수	***	**	**	***

※ ‘21. 발주예정, 설계결과에 따른 설치불가 등 관련

○ 재배정 예산 (자치구)

- (편성) ‘20~’21년까지 2개소 3대 연간 누적 사업비(설계·공사비)**********

**************************************************************

***************************************

- (실적) 남성역 ‘21.9. 완료예정(공사 중), 중화역 ‘22.10. 완료예정(설계 중)

□ 국고보조금(국비매칭 예산) 사업

○ (편성) ‘08~‘19년까지 E/S 및 E/L 278개소 434대 연간 누적 사업비 ***********

- ************************************************

○ (실적) ‘09~’20년까지 E/S 및 E/L 247개소 391대 설치(E/L 97개소 97대, E/S 150개소 294대), *************

- **********************************************

************************************

< 국고보조금 집행현황 >

(단위: 백만 원)

구분	예산편성 (①)	집행현황		불용예상액* (④=①-②-③)
		집행액(②)	집행예정(③)
***	*******	*******	******	********* *************************
**	********* **********	********* **********	********* ********	********* ********

불용예상액* : 사업완료(‘21) 후 정산 시, 금액 변경될 수 있음

추진 시 고려사항

□ 예산편성(예산심의) 사업

○ 설계중 투자심사 대상(총사업비 40억 이상) 14개소(당초 12) 발생

- 지반 조사, 관련기관 협의 시 지장물 이설 등 공사비 증액

□ 투자심사 완료: ‘21. 3. - ************************

□ 투자심사 예정: ’21. 5. - *************************************** **********************************

※ 공사비 증액으로, 2개소(신풍, 새절) 추가

- ‘17~‘20년까지 E/S 및 E/L 14개소 32대 연간 누적 사업비(설계‧공사비) ********* 편성

		*********************************************************************** ***********************************************

□ 국고보조금(국비매칭 예산) 사업

○ 예산사업 종료 시기(‘21) 도래에 따른 1역사 1동선 미확보 ****에 대한 사업비(*****************) 부족

		교통약자 등 지하철 이용자 이동편의 제공을 위한 1동선 사업비 확보 필요 ⇒ 전액 市 예산편성

3		‘21. 세부 추진계획

✜ 3개 예산사업 분야, 총 4개 예산편성 유형으로 구성

- ************************

(’21. 4월 기준, 단위: 백만 원)

구분	예산사업 분야	예산편성 현황				추진기관 (진행사항)	비고
		유형 (‘21.사업 대상)		편성 기간	市 편성액 (‘21.편성액)
예산편성 완료	예산심의시, 편성예산사업 (의원발의)	*****************	****	‘14. ~‘21.	******* ********	교통공사 (추진 중)
		** *	*********** *******************************
			************** ***************************
			************* ***************************** ***************************
		****************	****
			************* *********************************	‘20. ~‘21.	***** *******	동작구 (‘21.9. 완료)	공사중
			************* ************************	‘21.	*** *****	중랑구 (‘22.10. 완료)	설계중
	국고보조금 예산사업	****************	*****	‘08. ~‘19.	******* ***	교통공사 (‘21. 완료)
			************ ****************************
			*********** **********************************
예산편성 예정	1역 1동선 확보사업	****************	****	‘21. ~‘24	****** *******	교통공사 (‘24. 완료)	‘21. 추경
			*********** ***************************

예산편성(예산심의) 사업

1. 출자금 사업

○ 승강편의시설 설치 - ******************

******************************

**********************************************

※ 그간 사업추진(설계용역 등)을 통한 ’21년 공사 완료예정 물량임

연번	시설명	대수	총사업비	비고
계			******
1	E/S	**	******
2	E/L	*	*****

○ 투자 심사(‘붙임 1, 2’ 참고) - *****************

- 추진 방안

· 예산확보: 도시철도건설사업비 특별회계(사업별 시비 100%)

· 사전절차: (중기지방재정계획) 차년도 반영, (투자심사) 설계 등 여건 고려하여 추진

- 추진 내역 : ***************************

구분	사업대상	의뢰 시기	의뢰건수	비고
계		-	**
투자심사 완료	**************************** *****************	******	*
투자심사 예정	************ **************************************************************** *********** **************************************************************************************************************	**** ***	**	**** *** **** *****

< 투자심사 대상 내역 >

(단위: 백만 원)

구 분		대상지	편성현황		사업비 (설계‧공사비)	비고
			기투자	투자계획
		합 계			******
투자심사 완료 (2건)		소 계			******
	3월 (2건)	-남부터미널, 먹골	***** **********	***** **********	******
투자심사 예정 (12건)		소 계			******
	5월 (2건)	-방이, 중화	*** ***********	***** **********	******
	6월 (2건)	-서울대입구, 새절	***** ***********	***** **********	******
	7월 (3건)	-문래, 아현, 신풍	***** ******	****** **********	******
	8월 (4건)	-교대, 대치, 둔촌동, 청담	*** ***********	****** **********	******
	9월 (1건)	-거여	*** ******	***** **********	*****

○ ‘21년 승강편의시설 편성예산 추진

- 추진 방안 : 설계 진행사항 등 사업현황 관리  ※ 출자금 지급(’21.3.)

- 추진 내역 : ******************************************************

(단위: 백만 원)

구분	시설명	개소 (대수)	편성금액		주요내용	비고
계		19 (33)	******		-
출자금	E/S	15 (29)	******		-
				*****	**************************** ****************************
				*****	***************************
				*****	***************************
				*****	**********************
	E/L	4 (4)	*****		*
				*****	************************** ***************************
				*****	**************************

2. 재배정 사업

○ 추진 방안 : 예산 집행사항 등 사업현황 관리  ※ 예산 재배정(‘21.3.)

○ 추진 내역 : E/S 및 E/L 공사 2개소 3대 완료, E/S 설계 1개소 2대 완료

(단위: 백만 원)

구분	시설명	개소 (대수)	편성금액		주요내용	비고
계		* ***	******		*
출자금	E/S, E/L	* ***		*****	***************
	E/S	* ***		***	***************

< 설치계획 >

(단위: 백만 원)

연번	시설명	대상지			예산현황			설치계획		총 사업비	추진기관 (기간)	비고
		호선	역명	위치	연도	유형	금액	‘21.	‘22.
계							*****	3대	2대	*****	-
1	E/L	1	남성역	2번 일대	‘21	공사비	*****	1대	-	*****	동작구 (‘20.1~’21.9)	**** ****** ***
	E/S							2대	-
2	E/S	2	중화역	2번 출구	‘21	설계비	***	-	2대	*****	중랑구 (‘21.3~’22.10)

3. 국고보조금 사업

□ 국비매칭 사업

○ 추진 방안 : 설계 진행사항, 공사 진행사항 등 사업현황 관리

○ 추진 내역 : E/S 및 E/L 26개소 27대 설계완료, E/S 및 E/L공사 15개소 21대 설치 완료

구분	시설명		개소 (대수)	진행사항	비고
합계			** ****
	소계		** ****
설계		E/S	* ***	*******************
		E/L	** ****	*******************
공사	소계		** ****
		E/S	* ****	*******************
		E/L	* ***	*******************

4. 1역 1동선 사업

□ 출자금 사업(‘붙임 3, 4’ 참고)

○ 추진 방안

- 예산 확보: 도시철도건설사업비 특별회계(사업별 시비 100%)

- 사전 절차

‣(중기지방재정계획) 차년도 반영

‣(투자심사) 설계 등 사업 고려, 추진

○ 추진 내역

- ’21. 추경 *********, ‘22. ~ ‘24. 연차별*********** 편성

(단위: 백만 원)

구 분		대상지	편성연도		사업비 (설계‧공사비)	비고
			설계비	공사비
		합 계			******
설계 중 12역		소 계			******
	8역 (‘21. 6. 예정)	- 종로3가, 강동, 봉화산, 새절, 상월곡, 수락산, 청담, 광명사거리	-	‘21. 추경	*****	미편성시 ‘22. 편성
	1역 (‘21. 9. 예정)	- 고속터미널		‘22.~ ‘24.	*****
	3역 (투자심사)	- 구산, 남구로, 복정		”	******
지속검토 4역		소 계			******
	2역 (검토 중)	- 상일동, 대흥 ※ 상일동: 국비매칭 예산 설계 예정 (’21.7.~‘21.12.)	‘22 (대흥)	‘22~ ‘24.	*****
	2역 (투자심사)	- 신설동, 까치산	‘22.	‘23.~ ‘24.	******

4		향후 계획

□ 투자심사 대상 관련

○ 총 13개소에 대해 설계완료 등 사업 여건 고려, ‘21년 순차적 투자심사 의뢰

□ 지하철 1역 1동선 확보 관련

○ ’21년 추경 전 설계완료 예정 대상 8개소 우선 예산편성

※ 설계 중인 5개소 진행사항 등 여건 고려, 연차별 예산 편성

○ 투자심사 대상 5개소 ‘21년 투자심사 이행 후 연차별 예산편성

□ 재배정 등 사업 관련

○ 공사 진행 사항 등 사업 현황 관리 철저

붙임 1. 투자심사 대상 사업개요 1부

2. 투자심사 대상 연차별 세부투자계획 1부

3. 1역사 1동선 미확보 16역 사업현황 1부

4. 1역사 1동선 미확보 16역 연차별 세부 투자계획 1부.  끝.