투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	서 울 특 별 시 장(산지방재과장)
(경유)
제목	「2021년 남산공원 산사태 예방공사」관련 부족예산 재배정 요청

1. 산지방재과-292(2021. 01. 12.)호 및 산지방재과-3354(2021. 04. 06.)호와 관련입니다.

2. 「2021년 남산공원 산사태 예방공사」 와 관련하여 해당 공사추진중 현장여건 변동 등으로 인한 공사비가 증가 및 남산공원 담장붕괴 사면지 복구에 따른 기 재배정 예산 초과분을 아래와 같이 재배정 요청합니다.

가. 사 업 명 : 2021년 남산공원 산사태 예방공사

나. 대 상 지

- 당  초 : 용산구 한남동 산9-25 외 2개소

- 변  경 : 용산구 한남동 산9-25 외 3개소(중구 장충동2가 산14-48 추가)

다. 요청사유

- 집중호우로 인해 남산공원 담장붕괴가 발생함에 따라 기 협의한 대로 배정된 예산의 집행잔액 및 낙찰차액을 활용하여 복구공사 시행

- 추진중인 「2021년 남산공원 산사태 예방공사」의 현장여건 변동으로 인한 물량증감 등에 따른 공사비 증액이 필요하여 추가 배정 요청

라. 추가 요청액

- 당 초 : *********

- 변 경 : ********************                                  (단위 : 원)

기관 연번	위 치	사업종	배정요구액 (단위 : 원)
			소 계	도급비	관급비
중부사업소 4 (추가)	***************	*****	**********	**********	*

※ 담장붕괴 사면지 복구공사에 소요되는 예산은 13,150천원이나, 기 배정된 예산을 활용하고 부족분에 대한 요청

붙임  1. 예산집행현황 1부

2. 복구공사 방침서 1부.   끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	정정훈		공원조성팀장	이종무		시설과장	05/12 권종화
협조자
시행	시설과-1919	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동) 서울중부공원녹지사업소 4층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/	junghoon0113@seoul.go.kr	/	부분공개(5)