문서번호	하천관리과-6709
결재일자	2021. 5. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
박진화	박시현	손경철		05/10 최진석
협 조

「빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역」

준공기한 연기 검토보고

2021. 05.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역」

준공기한 연기 검토보고

빗물펌프장 16개소에 대하여 30년빈도의 강우량대비 수방능력향상을 위한 “빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역” 진행 중 본 용역 추진사항에 대한 유관기관 협의가 필요하여 준공기한 연기검토 보고

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역

❍ 용역기간 : 2020. 05. 20. ~ 2021. 05. 14.

❍ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 1

❍ 계약금액 : 486,690,000원

❍ 과업내용 : 빗물펌프장 16개소 방재성능 향상(30년빈도)계획수립

- 집중호우를 대비한 기존 방재시설물 시설 능력 검토

- 효율적이고 경제적인 빗물펌프장 용량증대 계획수립

- 유입관거 통수능 검토 및 운영개선방안 수립 등

Ⅱ		추진경위

❍ 2020. 05. 20 : 용역착수

❍ 2020. 07. 27 : 착수보고회

❍ 2021. 02. 17 : 중간보고회

❍ 2021. 04. 29 : 최종보고회

Ⅲ		준공기한 연기 및 조치계획

□ 준공기한 연기내용

구 분	용역기간	용역금액	비 고
당 초	‘20.5.20.∼‘21.5.14.	486,690천원	금액변경없음 (60일 연장)
변 경	‘20.5.20.∼‘21.7.13.

□ 연기사유

❍ 한남재정비촉진사업 관련, 방재계획(보광,동빙고 빗물펌프장 존치여부)에 대하여 관련부서 사업 추진중으로 본 용역 과업기간을 연장하여 방재성능확보 계획에 대응하고자 함

(관련근거: 용산구 주거사업과-2619.‘21.3.11.촉진지구회의결과)

❍ 이수∼과천간 복합터널계획을 고려한 방배 빗물펌프장의 방재성능확보 방안의 조정(유역변경 등 추가방안 검토)등 연계검토 필요성 제기

❍ 본 용역 수행에 반영할 계획검토 및 협의기간이 필요

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치계획

❍ 위와 같이 “빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역” 준공기한을 연기 시행하여 효율적인 증설방안을 마련하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기 합의각서 1부.  끝.