문서번호	수상안전과-2822
결재일자	2021. 5. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
최윤정		윤재한	05/10 이용우
협조

예인선(3척) 중간검사를 위한 수리 용역

준공 기한 연기 검토 보고

2021. 5.

한강사업본부

(수상안전과)

「예인선(3척) 중간검사를 위한 수리 용역」

준공기한 연장 검토보고

예인선(3척)의 선박안전법에 따른 중간검사와 관련하여 선저파공 등의 검사관 지적사항에 따라 준공기한을 연장하여 수리를 실시하고자 함

용역현황

○ 용 역 명 : 예인선(3척) 중간검사를 위한 수리 용역

○ **************************************

○ ***********************

○ 착 수 일 : 2021. 4. 28.

○ 준공기한 : 2021. 4. 28. ~ 2021. 5. 22.(25일간)

검사개요

○ 검사대상 : 서울713호, 714호, 716호(3척)

- 10톤, LBD 11.3m x 4m x 1.6m, 1998.8.29.건조

○ 검사기관 : 한국해양교통안전공단, 서울지부

○ 검사기간 : 2021. 4. 28. ~

- 2021.5.4. : 1차 검사 완료,  2021.5.20. : 2차 검사 예정

○ 관련법령 : 선박안전법 제9조(중간검사)

□ 검사관 지적사항

○ 서울713호, 714호, 716호(공통)

- 씨체스트 개방 소제, 킬쿨러 소제, 선저변 소제

- 기관실 연료유 비상차단변 설치

- 수밀문 패킹 교체

- 절연저항 리포트, 추진기 수리 내역서 제출

○ 서울716호

- ************************

- *******************

*	*	*

□ 검토내용

○ 준공기한 연장사유

- 서울716호 선수의 선저 외판 파공이 발견되어 외판 신환 및 UT검사,

수압검사, 용접검사 등을 진행하기 위한 기한 연장이 필요함

○ 연장기한

- 당초 : 2021. 4. 28. ~ 2021. 5. 22.(25일)

- 변경 : 2021. 4. 28. ~ 2021. 5. 31.(34일)

□ 검토의견

○ 서울713호, 714호, 716호의 중간검사 중 검사관의 지적사항에

따라 외판 신환 및 UT, 수압 검사등을 진행하기 위해 상기와 같이

준공기한을 연장하여 수리하는 것이 타당함

붙임  1. 계약서, 준공기한 연기의뢰서 각 1부

2. 합의각서, 수리보완요청서(KOMSA) 각 1부.  끝.