“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(2정수 활성탄동 내부유지통로 바닥정비공사)

우리센터에서 시행중인『영등포아리수정수센터 2정수 활성탄동 내부유지통로 바닥정비공사』에 대하여 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

1. 공 사 명 : 영등포아리수정수센터 2정수 활성탄동 내부유지통로 바닥정비공사

2. 계약업체 : ㈜신광건설 대표 오재기

3. 공사기간 : 2021. 3. 10. ~ 5. 28.

4. 예산과목 : 상수도사업비. 영업비. 정수비. 수선유지교체비. 수선유지비

5. 설계변경 사유 : 신규공종 및 물량 증․감에 따른 설계변경

6. 설계변경금액 내역                                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비고
총공사비	144,812,390	169,950,000	증	25,137,610
도 급 비	144,812,390	169,950,000	증	25,137,610

붙임 : 1. 설계변경 시행문 및 검토보고 각 1부.

2. 계약금액조정 심사 관련 문서 각 1부.

3. 설계변경 내역서(정산) 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 1부.

5. 변경합의서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	박성택		정수시설과장	05/11 김현철
협조자
시행	정수시설과-4182	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5678	/전송	02-3146-5604	/	201401235@seoul.go.kr	/	부분공개(5)