투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	변경 계약 의뢰(관리동 흙먼지털이기 구매 설치)

난지물재생센터“관리동 흙먼지털이기 구매 설치”사업에 대하여 다음과 같이 계약변경의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 관리동 흙먼지털이기 구매 설치

나. 계약기간: 2021. 4. 26. ~ 2021. 5. 16.

다. 계약업체: *******

라. 변경사유: 타이어 공기충전기 위치 변경으로 인한 계약기간 증가

마. 예산과목: 사업비용(700), 영업비용(710), 처리장비(716), 수선유지교체비(214), 수선유지비(05)- 공통분야 유지보수

바. 변경내용: 계약 기간 변경

구 분	변 경 전	변 경 후	비고
계약 금액	************	************	변동없음
계약 기간	2021.04.26.~2021.05.16	2021.04.26.~2021.05.31	15일 연장

붙임  1. 방침서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	연윤모		시설팀장	우배용		시설보수과장	05/12 조선행
협조자	주무관	황선철
시행	시설보수과-1672	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)