투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰/예인선(3척) 중간검사를 위한 수리용역(설계(기간) 변경)

1. 수상안전과-2822(2021.5.10.)호와 관련입니다.

2.「예인선(3척) 중간검사를 위한 수리 용역」진행 중 검사관의 지적사항에 따라 외판

신환 및 UT검사 등을 위해 준공기한을 연장하고자 계약(기간)변경을 의뢰합니다.

가. 계약현황

- 건    명 : 예인선(3척) 중간검사를 위한 수리 용역

- 계 약 자 : 태항조선(주) (대표 유용수)

- **************************************

- 준공기한 : 2021.4.28. ~ 2021.5.22.(25일간)

나. 변경내역 : 준공기간 연장

변 경 내 역	변 경 전	변 경 후
*******	***********************	***********************

****1. 예인선(3척) 중간검사를 위한 수리 용역 - 준공기한 연장 검토보고 1부

2.***************************

3. 수리보완요청서 1부*****

	수상안전과장
주무관	최윤정		수상안전과장	05/12 윤재한
협조자
시행	수상안전과-2857	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0829	/전송	02-3780-0803	/	cyj0401@seoul.go.kr	/	부분공개(5)