문서번호	토목부-9135
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	05/13 김용제
협조

덕수궁 앞 보도 횡단경사 조정에 대한 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

2021. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

덕수궁 앞 보도 횡단경사 조정에 대한 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

덕수궁 앞 시청역 2번~3번 출구 구간 보도 횡단경사 구간에 대하여 시의회에서 적극행정 및 대안 마련을 요청함에 따라 보행정책과에서 횡단경사를 더 낮추도록 요청하여 공사를 시행하고 정산 보고 드림.

*******************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 보행정책과-3447호(´21. 3. 15.) : 횡단경사완화 조속시행 요청

○ 세종수 제2021-212호(´21. 5. 11.) : 덕수궁 앞 보도 횡단경사 조정

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

○ 위    치 : 서울역 교차로~시청 교차로

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021.  5. 31.

○ 도 급 비 : 6,422백만원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		보고내용

○ 본 사업의 보도 확장 방법은 확장되는 아스팔트 포장 부분에 보차도 경계석을 설치하고 보도 포장을 실시하는 것으로 기존 보도와 확장되는 곳의 아스팔트 포장도로 높이 차이가 평균 40cm 이상으로 당초 도로 경사가 5.3% 이상으로,

○ 보도 확장 공사시 보도에 자전거도로 및 버스승강장의 경사를 2~3%를 유지됨으로 부득이 전체적인 경사를 고려하여 경사진 보도(5.0~7.1%)가 설치되었음

※ 횡단경사 관련 규정(도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제28조)

- 보도 횡단경사는 2퍼센트 이하로, 다만, 부득이한 경우 4퍼센트 이하까지

- 확장.개수.보수 공사의 경우는 위 규정을 적용하지 아니함.

○ 서울시의회 홍성룡 의원이 보도횡단경사 조정에 대하여 적극 행정을 요구함에 따라 보행정책과에서 경사가 완화된 설계도서가 통보되어 긴급히 보도 횡단경사에 대한 보완 시공을 실시하고, 아래와 같이 정산하고자 함.

○ 횡단경사 현황

구분

검토내용

비고

계획평면도

현황사진

및

보도횡경사 완화방안

구분	STA.0+440.0	STA.0+480.0
현황 사진		기존경사 –6.4%
완화 방안
	완화방안1(보도하부를 올림)	완화방안2(보도상부를 낮추고 하부올림)

방안1,2를 병행

하여시공

○ 공사량 증·감 대피표

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
콘크리트 포장절단(야간)	포장두께 20cm이하	m	-	109	109
무근콘크리트 깨기(야간)	굴삭기0.4㎥+브레이카	㎥	-	27	27
금속제 배수로 설치(야간)	150×250×1200	m	-	58	58	재사용
화강판석 포장(주/야간)		㎡	-	223	223
점자블록(주/야간)	T60×300×300	EA	-	140	140
▣관급자재
화강판석(고흥석, 포천석)	50mm,도드락	㎡	-	245	245
점자블록	300×300×60,점·선형	개	-	145	145

○ 공사비 현황

【금액단위 : 원】

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
*******		**********	***********
***		**********	***********
****		**********	***********
*****		*********	**********
***		**********	***********
*****		**********	***********
****		**********	***********

Ⅳ		조 치 의 견

○ 덕수궁 앞 보도 횡단경사 조정은 시민 불편의 최소화 및 적극 행정을 위한 사항으로 추후 설계변경심의를 거처 내역에 반영하고자 함.  끝.

붙임  1. 보행정책과 공문 1부.

2. 건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.