문서번호	토목부-9126
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
배원영	박일연	05/13 김용제

공사장 안전시설물 설치 실정보고

(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

2021. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

공사장 안전시설물 설치 실정보고

(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

율곡로 공사구간내 도로종단구배 조정으로 인한 차도와 보도를 분리하고 보행자와 작업현장의 안전사고 예방을 위해 안전시설물 설치에 대한 실정보고 임

관련근거

○ 율곡감 2021-131호(2021. 5. 7.) 안전시설물 설치 실정보고 승인요청

공사개요

○ 공 사 명 : 율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사

○ 공사금액 : 51,371천원

○ 공사기간 : 2010. 10. 11 〜 2021. 06. 30

○ 시 공 사 : 북일종합건설(주) 외 1개사, 분담 2개사

○ 감 리 사 : ㈜케이씨아이외 1개사

보고내용

○ 터널 종점부에서 원남사거리간 도로구배 공사중에 있고 우체국 일부 철거후 복구공사가 진행중에 있으며, 현장내 PE방호벽 및 안전휀스를 추가로 설치하여 보행자 안전사고예방과 환경개선을 하고자 함

안전시설물 설치 현황	안전시설물 설치 현황
PE방호벽설치 위치도	안전휀스 설치 위치도

********

(단위 : 원)

**	**	**	******	**
******
**********	*	**********	**********
********	*	**********	**********
********	*	*********	*********
*******	*	**********	**********
********	*	********	********
*******	*	**********	**********

***********

**	**********				**
**********	****** ******************************** **************************************************************************************** ********************************** **************** *********************** *********************************************
**** ** ****	***	***	****	****	*** **
	********	*	*******	******
	************	*	*****	*****

************

******************************************************************************************************************************

*************************************************************************

조치의견

○ 터널종점부~원남동사거리 도로하향작업으로 인하여 차도와 보도를 분리하고 보행통로와 작업현장을 분리하여 안전사고 및 환경개선이 필요한 실정으로 상기보고와 같이 안전시설물 설치건에 대해 승인하고 추후 공사 설계변경에 반영하고자 함

붙 임 : 1. 감리단 실정보고 공문 1부 .끝.